문서번호	슬러지재활용과-7216
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
박성철		이동신	09/15 김동기
협조

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.9

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

준공기한 연기 검토 보고

우리센터 『원심탈수기 이전 전기공사』 시행중 선행 공정인 『2처리장 원심농축기 개조 및 3처리장 이전 설치』 공기의 미도래로 후속 공정인 전기공사 준공기한을 연기하고자 함

▢ 사업 현황

○ 건    명 : 원심탈수기 이전 전기공사

○ 사업기간 : '15. 06. 05 ~ '15. 09. 19

○ 도 급 액 : 100,015,460원

○ 도 급 자 : 호곡종합건설(주)   대표 박 성 환

▢ 보고내용

○ 준공기한 연기 사유

- 선행 공정인 『2처리장 원심농축기 개조 및 3처리장 이전 설치』 공사의        준공기한(‘15.10.08)이 후속 공정인 전기공사 준공기한(’15.09.19)보다        늦어서 전기공사 준공기한을 연기 하고자 함

○ 준공기한 연기기간

- 당초 : '15. 06. 05 ~ '15. 09. 19

- 변경 : '15. 06. 05 ~ '15. 10. 31

○ 귀책 사유 : 우리센터

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

첨부 : 합의각서 1부.  끝.