함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사

나. 계 약 자 : 대민공영(주)  대표이사 전인영

다. 계약금액 : 492,201,500원

라. 공사기간

- 당 초 : 2015.05.01. ~ 09.17.

- 변 경 : 2015.05.01. ~ 10.31.

마. 연기사유 귀책소재 : 동부수도사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 연기사유 :

- 공사장 주변 교통의 질적향상을 도모하고 시민불편 최소화를 위한 교통소통

대책 용역시행 및 병행 공사구간 업무협의에 따른 절대공기 부족

따로붙임 : 1. 준공연기 관련 서류 각 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박상열		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	전결 09/15 최명익
협조자
시행	급수운영과-24358	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개(7)