투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(서울시민 가족자연체험시설 전기공사)

우리 본부에서 추진하고 있는「서울시민 가족자연체험시설 전기공사」준공기한을 아래와 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천,철원)

나. 계 약 자

- 제천 : 토우건설(주)  대표 김사석

- 철원 : 학산전력(주)  대표 최돈학

다. 준공기한 연기

구 분		당 초	변 경	계약금액(원)	비 고
제천	준공기한	’15.07.13 ~ 15.09.17	’15.07.13 ~ ’15.10.30	58,044,000
철원	준공기한	’15.07.15 ~ 15.09.17	’15.07.15 ~ ’15.10.30	72,425,130

라. 연기사유

- 제 천 : 추가공사(CCTV설치 및 관리실 전기공사 추가)에 따른  연기

- 철 원 : 민통선 통제에 따른 연기

마. 계약금액 : 변동없음

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기검토보고서 및 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	09/15 박기형
협조자
시행	설비부-11409	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(7)