문서번호	교량안전과-1055
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
김귀용		하현석	09/15 代하현석
협조

성산대교 성능개선사업 설계용역

(1차용역 설계변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

안전총괄본부

(교량안전과)

성산대교 성능개선사업 설계용역

(1차용역 설계변경)

성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역 추진중 1차계약 금액중

예산 부족으로 미계약된 금액에 대하여 설계변경 검토 보고사항임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

○ 개    요 : 구조안전성 검토, 기본 및 실시설계(L=1,455m, B=27~39m)

○ 용역기간 : 2013.11.1 ~ 2015.10.31

○ 용 역 비 : 2,490,471천원(1차 2,397,000천원)

○ 용 역 사 : ㈜평화엔지니어링 외 3개사

□ 추진경위

○ 2013. 11.  1  :  설계용역 계약 및 착수

○ 2014. 12. 26  :  변경계약

○ 2015.  4. 23  :  기본설계 용역 완료

□ 설계변경 내역

○ 변경사유

- 총차 계약금액 2,490,471천원은 변경사항이 없으며

- 1차 용역 계약금액중 예산부족으로 미 반영된 93,471천원에 대하여 변경계약 체결

○ 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	변경사유
전 체	2,490,471	2,490,471	-
1차	2,397,000	2,490,471	증93,471	당초 미계약 금액 반영

※ 성산대교 성능개선사업 설계용역 설계변경 방침(시설안전정책관,  2014. 12.9)

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

총 계약금액 (총차)	2013년 (1차)	2014년 (2차)	2015년 (3차)	비 고
2,490,471	1,850,000	547,000	93,471

□ 조치사항

○ 총차 계약금액 2,490,471천원은 변경사항이 없으며, 1차 용역 계약금액 중 예산부족으로 미 반영된 93,471천원에 대하여 증액 변경계약을 체결코자 함

○ 1차 용역기간을 총차 용역기간과 동일하게 조정하여 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계에 추진에 만전을 기하고자 함

- 총차 용역기간 : 변경없음

- 1차 용역기간

․ 당 초 : 2013. 11. 1 ~ 2015.  6. 30

․ 변 경 : 2013. 11. 1 ~ 2015. 10. 31 (4개월 연장)

붙 임  1) 성산대교 성능개선사업 설계용역 방침서 1부

2) 변경설계내역서 1부.   끝.