문서번호	급수운영과-24343
결재일자	2015.9.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	09/15 최명익
협조

기성검사(관리) 조서(1회) 제출에 따른 검토 보고서 [광진구 관내 상수도공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

동부수도사업소

급수운영과

2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

기성검사(관리) 조서(1회) 제출에 따른 검토 보고서

『2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)』 시행 중 공사감독 대행기관인 ㈜이준엔지니어링으로부터 기성검사(관리) 조서(1회)가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1				공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 광진구 상수도공사(장기계속공사)

○ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,486m

○ 공사기간 : 2015.07.06. ~ 2016.06.30.

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : ************

2				기성검사(1차) 개요

○ 기성검사(관리)조서 제출 : 2015.09.14.

○ 기성금액 : ************

○ 기성내역                                                 (단위:원)

기성금액 합계	신설	개량	보온재교체	교체장애	물탱크철거
***********	***********	*********	*******	*******	*******

3				검토사항

○ 검토내역

- 공사(기성)기간 : 2015.07.06.~2015.08.22.

- 공사종류 : 신설, 개량, 보온재교체, 교체장애, 물탱크철거

- 검토내용 : 공사기간까지의 공사전반에 걸쳐 공사설계 도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 시행여부 확인

- 검토결과 : 적정 공사시행으로 전공사의 18.5%가 준공(기성)되었음을 인정함.

○ 예산 사용내역

구 분	계약금액(원)	금회 기성금액(1차)		기 지급액 (노무비지급)	집행잔액		비고
		금액(원)	비율(%)		금액(원)	비율(%)
금 액	644,600,350	119,339,000	18.51	36,993,000	488,268,350	75.74

4				조치 의견

○ 위와 같이 검토한 바 기성내역이 타당하므로 기성처리 하고자 하며, 기성시행 후 행정지원과와 협의하여 기성금 지급 등 후속 업무를 추진코자 합니다.

붙 임 : 1. 기성검사(관리)조서 제출 서류 1부.

2. 정산내역서 1부. 끝.