함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(서울명수학교외 6개소 아리수 직결음수대 설치공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『서울명수학교외 6개소 아리수 직결음수대 설치공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차-최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울명수학교외 6개소 아리수 직결음수대 설치공사

나. 도 급 자 : (주)흥창엔지니어링 대표 백동진

다. 공사기간 : 2015.07.09~2015.10.10

라. 설계변경내용 : 물량 증․감 및 신공종 발생

마. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

바. 설계변경 내역                                               (단위 : 원)

구 분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증․감	비고
도급비(VAT포함)	34,557,900	36,114,000	증) 1,556,100

첨부 : 1. 설계변경심의위원회 개최결과 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	유형근		주무관	유명수		시설관리과장	나태산		중부수도사업소장	09/15 설동을
협조자	★주무관	은정호
시행	시설관리과-27458	(		)	접수		(		)
우	04605	서울시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	3146-2239	/	bandyyhk@seoul.go.kr	/	대시민공개