문서번호	급수운영과-24335
결재일자	2015.9.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
박상열	김태형	최명익	09/15 홍현구
협 조

준공기한 연기 검토보고

【자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사】

2015.09.

동부수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기 검토보고

우리사업소에서 시행중인『자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사』현장감독(서울시시설관리공단)으로부터 제출된 준공기한 연기 건에 대한 검토 보고임

Ⅰ		공사 현황

□ 공 사 명 : 자양동 796번지 외 2개소 배급수관 정비공사

□ 공사기간 : 2015.05.01. ~ 09.17.

□ 공사개요 : D=20~300mm, L=2,258m

□ 도 급 액 : 금492,201천원

□ 도 급 자 : 대민공영(주) 대표이사 전인영

□ 공사감독 : 서울특별시 시설관리공단(공사감독2처)

□ 공정현황 : D=20~300mm, L=1,748m 관부설 완료(74%)

Ⅱ		보고 내용

□ 감독자(시설관리공단) 의견

○ 준공기한 연기사유 및 가능일수 : 절대공기 부족(44일)

- 교통소통대책 수립용역 기간 : 57일

- 병행공사(도로확장) 구간 시공 업무협의 : 9일

※ 지연일(66일) 중 공정대비 가능일수인 44일 적용

○ 준공기한 연기

- 당  초 : 2015.05.01. ~ 09.17.

- 변  경 : 2015.05.01. ~ 10.31.(44일 연기)

○ 귀책사유 : 발주청

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 사업소 검토내용

○ 준공 연기사유 및 가능일수 : 절대공기 부족 44일 ⇒ 적정

- 교통소통 대책 수립용역 기간 : 57일

● 자양번영로 도로점용공사 허가조건(광진경찰서) : 시민불편 최소화 및 교통소통의 질적향상 도모를 위한 교통소통대책 수립 및 야간공사 변경시행

⇒ 교통소통대책 용역 추진계획 수립【급수운영과-12520(`15.5.26)호】

⇒ 교통소통대책 용역 시행 : `15.06.08 ~ 08.05.

- 병행공사(도로확장) 구간 시공 업무협의 : 9일

● 병행공사(도로확정을 위한 띠녹지 제거)에 따른 유관기관과의 업무협의【광진구청 도로과-14016(`15.09.11)호】

Ⅲ		보고자 의견

□ 상기와 같이 교통소통대책 용역시행 및 병행공사구간 업무협의 등으로 절대공기가 부족한 실정인 바, 아래와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

○ 준공기한 연기

- 당  초 : 2015.05.01. ~ 09.17.

- 변  경 : 2015.05.01. ~ 10.31.(44일 연기)

○ 귀책사유 : 동부수도사업소

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기원 및 관련서류 각 1부. 끝.