문서번호	설비부-11393
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	09/15 박기형
협조

준공기한 연기 검토 보고

(서울시민 가족자연체험시설 전기공사_제천,철원)

2015.  9.

도시기반시설본부

[설 비 부]

준공기한 연기 검토 보고

(서울시민 가족자연체험시설 전기공사_제천,철원)

「서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천,철원)」관련, 교육정책과로부터 CCTV 추가공사 요청 및 철원 민통선 통제에 따른 전기공사 준공기한 연기에 대한 검토 보고임.

사업개요

□ 건 명 : 서울시민 가족자연체험시설 전기공사(제천,철원)

□ 준공기한 : 2015. 9. 17

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

구 분	계약자	공사기간		계약금액 (변경없음)	비 고
		당 초	변 경
서울시민 가족자연 체험시설 전기공사(제천)	토우건설(주)	2015.07.13 ~ 2015.09.17	2015.07.13 ~ 2015.10.30	58,044,000원
서울시민 가족자연 체험시설 전기공사(철원)	학산전력(주)	2015.07.15 ~ 2015.09.17	2015.07.15 ~ 2015.10.30	72,425,130원

□ 연기사유

- 추가공사(CCTV설치 및 관리실 전기공사 추가)에 따른 공기 부족(제천)

- 민통선 출입 신청기간 및 북한도발에 따른 민통선 통제로 인한 전기 공사 공기 부족(철원)

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

조치의견

□ CCTV 추가설치 및 민통선 통제 등으로 전기공사 기간이 부족하여  준공기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 하며

□ 건설총괄부에 준공기한 연기 의뢰 하고자 함.

□ CCTV시설 및 추가 공사분은 설계변경 후 별도 보고 예정임.

붙임 : 1. 관련공문서 1부.

2. 합의서 2부.  끝.