문서번호	시설과-5606
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	관리부장
서동민		공헌구	09/15 심상원
협조
	주무관		이상국

미리내다리 정밀안전진단 추진계획

2015. 9

시 설 과

미리내다리 정밀안전진단 추진계획

서울대공원 최장 연장 교량인 미리내다리는 준공된지 30년 이상 경과된 노후 시설물로서 구조적 안전성 확보를 통한 재난 발생을 사전에 예방하고자 정밀안전진단을 추진코자 함

□ 추진근거

◦ 2014년도 특정관리대상시설 일제조사 결과보고 (시설과-7379호, ‘14.11.28)

◦ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

□ 추진경위

◦ 1998. 9 : 특정관리대상시설 지정

◦ 2007. 8 ~ 2013. 12 : 정밀점검 시행(5회)

- 정밀점검용역 3회, 외부전무가 활용 정밀점검 2회

※ 안전등급 B등급

◦ 2014. 11. : 2014년도 특정관리대상시설 일제조사

※ 안전등급 C등급

□ 정밀안전진단 필요성

◦ 교량하부 접합부 철근노출 및 부식 등으로 시설물 보수보강이 요구되며 시설물 안전성 확보를 위한 정밀안전진단 실시 필요

⇒ 2014년도 특정관리대상시설 일제조사 결과

◦ 특정관리대상시설에서 시특법 2종시설로 시설물관리 상향 변경 추진

□ 추진계획

◦ 사업개요

- 용 역 명 : 미리내다리 정밀안전진단 용역

- 용역규모

시설명	종 별	준공일	폭	경간수	최대경간장	연장	면적	상부형식	하부형식
미리내다리	법정외	1983년	30.0	12.0	10.00	140	-	RCS	RA

- 용역기간 : 2015. 10 ~ 2015. 12 (착수일로부터 60일)

- 용 역 비 : 25백만원

- 과업의 내용

1) 관련자료 수집․분석 및 계획수립

2) 현장조사 및 시험

3) 시설물 상태평가 및 안정성 평가

4) 종합 평가, 안전등급 지정 및 보수․보강방법

5) 안전점검 업무편람 등 유지관리방안 제시

◦ 계약 방법 : 수의계약

□ 추진일정

◦ ‘15. 9. 20 : 기술용역 타당성 심사 요청 및 예산배정

◦ ‘15. 9. 30 : 공고 및 계약

◦ ‘15. 10. 1 : 용역 계약 및 착수

◦ ‘15. 12. 5 : 용역 준공

□ 행정사항

◦ 정밀안전진단 기술용역 타당성 요청 (시설과 → 기술심사담당관)

◦ 예산배정 요청 (시설과 → 총무과)

◦ 계약발주 의뢰 (시설과 → 총무과)

◦ 정밀안전진단 용역 시행 (시설과)

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 용역설계서 1부.