문서번호	설비부-11384
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
이호기		유병기	09/15 박기형
협조
	주무관		임경태

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

주차장 위치변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  09.

도시기반시설본부

설비부

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』

주차장 위치변경 검토 보고

「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」과 관련하여 주차장 위치변경에따른 공공하수도 설치(변경) 고시(안)에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

▢ 공 사 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

▢ 공사규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설 및 기존시설 철거, 상부공원화

▢ 공사기간 : ‘2012.11.15. ~ ’2016.6.30

▢ 공사금액 : 63,516백만원

▢ 시 공 사 : 대림산업(주) 외 2

▢ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

2		관련근거

▢ 서분감 제2015-530(2015.9.10)

- 주차장 위치변경에 따른 공공하수도 설치(변경) 고시(안) 자료 제출

3		추진경과

◦ 2001.10.15. 서울특별시고시 제2001-326호

- 도시계획 결정 및 변경결정(폐기물처리시설 신설 9,282㎡)

◦ 2011.09.16. 조달청 입찰공고(턴키)

◦ 2011.11.05. 입찰안내서 질의사항 답변 회신(물재생시설과→본부)

- 주차장의 경우 제시된 부지경계 외측 인접부지에 설치, 계획할수 있는지?

⇒ (답변)입찰에 참여하고자 하는 자는 금회 사업의 특성을 고려하여 적정 주차수요 및 위치를 선정하여야 합니다.

◦ 2012.10.10. 공공하수도 설치(변경) 고시요청(본부→물재생시설과)

◦ 2012.12.13. 서울특별시고시 제2012-337, 공공하수도 설치(변경)

- 분뇨처리시설 면적 6,131→15,000㎡, 시설용량 2,000→4,000㎥/일

◦ 2015.04.14. 사업부지 관련 업무지시(본부→감리단)

- 주차장 등이 생활환경과에서 추진중인 음식물처리시설 부지와 간섭, 검토        하여 대안수립 제출 지시

◦ 2015.04.28. 감리단 검토보고

- 주차장 및 지열시스템을 동측 자재적치장 부지로 시공(안) 제시(사업부지 외)

◦ 2015.05.07. 공사 현안사항 검토회의 개최

- 물재생시설과, 서남환경, 본부 참석 감리단 검토(안)으로 추진 협의

◦ 2015.05.11. 현안사항 관련 업무지시(본부→감리단)

- 공공하수도 설치(변경) 고시에 필요한 서류 작성 제출 지시

◦ 2015.09.10. 감리단 주차장 위치변경에 따른 공공하수도(변경) 고시(안) 제출

4		사업관련 고시

▢ 2001.10.15. 도시계획(지역․시설) 결정 및 변경결정

◦ 서울특별시고시 제2001-326호(2001.10.15.)

구 분	시설명	위 치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후
변 경	하수도	강서구 마곡동 205일대	1,061,705	감 9,282	1,052,423
신 설	폐기물처리시설	강서구 마곡동 101일대	-	증 9,282	9,282

▢ 2012.12.13. 공공하수도 설치(변경) 고시

◦ 서울특별시고시 제2012-337호(2012.12.13)

- 사업시행지 위치 및 면적

구 분	위 치	면 적	비 고
당 초	강서구 양천길 546 서남물재생센터 내	6,131㎡
변 경	서남물재생센터 내 (당초부지 서측)	15,000㎡	시설용량 증설 및 상부 공원설치

- 설치 시설의 종류 및 용량

구 분	시설의 종류	명 칭	시설용량	비고
당 초	공공하수처리시설(서남물재생센터)	서남분뇨처리시설	2,000㎥/일
변 경	(변경없음)	(변경없음)	4,000㎥/일

- 사업시행기간 : 2009.6월 ~ 2015.2월

5		실정보고 내용

▢ 변경사유

◦ 분뇨처리시설 주차장 부지가 폐기물처리시설 부지와 간섭으로 위치변경 추진

부지간섭 현황도

▢ 변경내용

◦ 주차장 위치를 공사현장 동측 자재적치장 부지로 변경

당 초	변 경

◦ 변경 상세내용

구 분	당 초	변 경	비 고
주차장 위치	분뇨처리시설 부지 북측	분뇨처리시설 부지 동측
부 지 면 적	15,000㎡	16,500㎡
사 업 행 기 간	2012.12 〜 2015.2	2012.12 〜 2016.6

6		감리단 검토의견

◦ 향후 계획된 폐기물처리시설(음식폐기물처리시설) 부지내에 서남분뇨처리시설의 주차장이 계획되어 있어 주차장 위치변경 불가피

◦ 2015.5.7. 관련기관 합동회의에서 공사현장 동측으로 위치변경 협의

◦ 당초 고시 대비 주차장 위치, 사업부지 면적, 사업기간의 변경으로    공공하수도 설치 고시 변경이 필요함.

7		보고자 의견

◦ 감리단 검토의견과 같이 분뇨처리시설 주차장 부지가 향후 계획된 음식폐기물처리시설 부지와 간섭 되므로 주차장 위치변경이 필요하며,

◦ 2015.5.7. 물재생시설과, 서남환경 합동회의에서 주차장 위치를 공사현장 동측으로 위치변경 협의 되었으므로,

◦ 2012.12.13. 공공하수도 설치(변경) 고시(제2012-337호)의 사업부지 면적, 사업기간, 계획평면도가 변경되므로 물재생시설과에 변경고시 요청코져 함.

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 공공하수도 설치(변경) 고시(안) 1부. 끝.