문서번호	건축부-10565
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김희태		곽동호	09/15 안재혁
협 조
	교육사업지원팀장			최형대

「2015년도 서울시민 가족자연체험시설 (철원)」

공사기간 연장 검토 결과 보고

2015. 09.

「2015년도 서울시민 가족자연체험시설 조성공사(철원)」

공사기간 연장 검토 결과 보고

『2015년도 서울시민 가족자연체험시설 조성공사(철원)』관련 민북출인 신청 등 민통선 통제기간을 반영하기 위하여 공사기간 연장을 검토 보고함

□ 공사개요

○ 위    치 : 강원도 철원군 근북면 유곡리 512번지 외 3필지

○ 규    모 : 시설부지 14,801㎡, 교사동

○ 공사범위 : 화장실, 샤워실, 취사·세척장, 주차장 등

○ 공사기간 : '15. 7. 23 ～'15. 9. 20

○ 도급금액 : 211,397,000원(건축)

○ 시 공 사 : 흥일건설주식회사

□ 관련근거

○ 2015년도 서울시민 가족자연체험시설 조성공사(철원) 공기연장 요청

[흥일건설-제2015-091400호(2015.9.15.)]

□ 실정보고 세부내용

○ 2015. 6. 17. : 공사 발주 의뢰

○ 2015. 6. 26. : 공사 공고

○ 2015. 7. 17. : 공사 계약

○ 2015. 7. 23. : 공사 착공

○ 2015. 8. 21. : 북한 도발에 따른 민통선 통제

○ 2015. 9. 15. : 공사기간 변경 요청(시공자 → 건축부)

□ 검토현황

○ 요청내용

구분	공사기간	비고
변경전	2015. 7. 23. ~ 2015. 9. 20.
변경후	2015. 7. 23. ~ 2015.10.11.	21일 연장

○ 요청사유

- 민북출입 신청기간, 북한도발에 따른 민통선 통제에 따른 공사기간 필요

- 철원군 발주 선공사로 인한 공사기간 필요

□ 검토 및 처리의견

○ 공사기간 연장

- 민북출입 신청, 북한도발에 따른 민통선 통제기간 추가 소요

- 철원군 발주 선공사로 인한 공사기간 추가 소요

○ 지체상금

- 귀책소재 : 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 행정사항

○ 방침 수립 즉시 변경 계약의뢰 : 건축부 → 건설총괄부

○ 향후계획

- 2015. 9월 : 공사기간 연장

- 2015. 10월 : 공사 준공 및 시설물 인수인계

붙 임 : 추가공사 요청 공문 1부.  끝.