문서번호	토목부-19465
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	09/16 노우성
협조

교통안전시설물 추가설치 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

2015. 9.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

교통안전시설물 추가설치 검토보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

겸재교 본선개통 이후 관할 자치구 및 경찰서등에서 차량운전자 및 보행자 안전사고 예방을 위해 교통안전시설 추가 설치 요구가 있어 이에 대한 검토보고임

1		관련근거

❍ 동일(겸재)감 제15-202(2015. 9. 4.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 동대문구 휘경동 휘경여중고 ~ 중랑구 면목동 동일로 사거리

❍ 규    모

- 본교량 : B=18.24m, L=235m(Extra Dosed교)

- 접속교량 : B=9m, L=160m, 접속램프 2개소

- 도로확장 : B=20m → 30m, L=750m

❍ 공사기간 : 총괄 2008.10.23. ∼ 2015.12.31.

(7차 2015. 3.16. ~ 2015.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 29,478백만원(7차 3,166백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 1  ❍ 시 공 사 : ㈜한진중공업외 1

3		감리단 보고내용

❍ 설치사유

- 본선개통 이후 관할 자치구 및 경찰서등에서 차량운전자 및 보행자 안전사고  예방을 위해 교통안전시설 추가 설치를 요구함

❍ 주요 요구사항 및 반영내용

구 분	요 구 사 항	반 영 내 용	비고
국회의원 보좌관	- 주교량 종점부 차량축소부분 방호벽 설치 - 벧엘교회앞 교량 진출입부 중분대 추가설치 - 주교량 시종점부 PE방호벽 상단 갈매기 표지판설치	- 콘크리트 방호벽 15경간(30m) 설치 - 무단횡단방지시설 설치된 상태임 - 갈매기 표지판(6개) 설치	반 영 기설치 반 영

구 분	요 구 사 항	반 영 내 용	비고
휘경공고	- 중분대 결속 - 접속교량과 하부도로 합류지점 안전시설 설치	- 독립형 차선분리대로 결속이 불가함 - 안전지대 라인마킹 및 시선유도봉 설치함	불 가 반 영
동대문구청	- 휘경공고 정문앞 횡단보도 부근 학생들의 무단 횡단으로 교통사고 위험이 있으므로 무단 횡단 중앙분리대 연장설치	- 무단횡단 방지시설 연장설치	반 영
중랑경찰서	- 도로안전시설물 설치 콘크리트 방호벽 - 교통안전용품 설치 장방향 경광등	- 주교량 종점부 차로축소부 설치 약 30m - 주교량과 접속교 연결부(종점)에 설치	반 영 반 영

❍ 검토내용

- 시점부(동대문구) 교통안전시설 검토

현 황(문제점)	대 책	비고
- 보행자 무단횡단을 방지하기 위한 보행자 방호울타리 및 무단횡단방지시설이 휘경 공고앞 횡단보도까지만 설치되어 있어, 휘경여중고 삼거리와 휘경공고앞 횡단 보도사이 일부구간이 미설치 상태임.	- 등하교시 학생 및 보행자 안전사고 예방을 위하여 미설치된 구간에 보행자 방호울타리 및 무단횡단방지시설 설치 · 보행자방호울타리 : 130⇒192(62경간 추가) · 무단횡단방지시설 : 60⇒86(26경간 추가)	휘경공고 및 동대문구청 요구사항

- 종점부(중랑구) 교통안전시설 검토

현 황(문제점)	대 책	비 고
- 주교량 종점부와 접속교량이 만나는 지점이 편도2차로→1차로로 차로가 축소되는 구간으로 현재 시선유도봉만 설계에 반영 되어 있는 상태임.	- 2차로→1차로로 축소되어 차량의 안전 사고가 우려되므로 콘크리트 방호벽 및 갈매기 표지, 장방향 경광등을 설치 · 콘크리트 방호벽 : 0⇒15(15경간 신설) · 갈매기 표지 : 0⇒ 6(6개 추가) · 장방향 경광등 : 0⇒ 1(1개 신설)	국회의원 보좌관 및 중랑경찰서 - 요구사항

- 주요공종 증·감 현황

구 분		단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증,감
시점부 (동대문구)	보행자 안전난간	경간	130	192	증 62	124m
	무단횡단방지시설	경간	60	86	증 26	52m(관급자재)
종점부 (중랑구)	보행자 안전난간	경간	160	160	-	-
	무단횡단방지시설	경간	90	90	-	-
	콘크리트 방호벽	경간	-	15	증 15	30m
	장방향 경광등	개	-	1	증 1	-
시선유도표지	갈매기 표지	개	12	18	증 6	-

❍ 적용단가 및 공사비 증·감 현황

- 적용단가 검토

· 기존비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

①항 1호에 의거 계약단가 적용.

· 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

②항에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률      (85.337%)을 곱한 단가 적용

- 공사비 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초		변 경		증·감		비고
			수량	금액 (천원)	수량	금액 (천원)	수량	금액 (천원)
시점부(동대문구)				52,465		77,518		25,053
시선유도표지				1,328		1,992		664
- 갈매기표지		개	12	1,328	18	1,992	6	664
방호시설				51,137		75,526		24,389
- 보행자안전난간	H1.0xW2.0,토공용	경간	130	51,137	192	75,526	62	24,389
종점부(중랑구)				65,358		71,431		6,073
방호시설				65,358		71,431		6,073
- 보행자안전난간	H1.0xW2.0,토공용	경간	101	39,730	101	39,730	-	0
- 보행자안전난간	H1.0xW2.0,옹벽용	경간	59	25,628	59	25,628	30	0
- 콘크리트 방호벽	600(150)x900x2000	경간	-	-	15	4,773	15	4,773
- 장방향 경광등	태양충전식	개	-	-	1	1,299	1	1,299
직접공사비				117,823		148,948		31,125
제경비				49,877		62,052		12,175	부가세포함
도급금액				167,700		211,000		43,300
관급자재비				31,200		36,600		5,400
총사업비				198,900		247,600		48,700

4		검토의견 및 조치의견

❍ 본선개통 이후 추가 교통안전시설물 추가 설치를 요구한 사항에 대해 감리단에서 검토한 내용이 적정하므로 승인하고

❍ 관급자재 구매 및 향후 설계변경시 위 사항을 반영 조치하고자 함.

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.