문서번호	녹지관리과-3952
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
최수영	문경재	09/16 장상규

「뚝섬한강공원 환경정비 개선사업」 기본 및 실시설계용역 준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

한강사업본부

(녹지관리과)

「뚝섬한강공원 환경정비 개선사업」 기본 및 실시설계용역

준공기한 연기 검토보고

우리본부에서 추진중인 「뚝섬한강공원 환경정비 개선사업」기본 및 실시설계용역과 관련하여 준공기한 연기를 아래와 같이 검토하고 보고드림

Ⅰ		용역현황

용 역 명 : 뚝섬한강공원 환경정비 개선사업 기본 및 실시설계 용역

대 상 지 : 뚝섬한강공원(영동대교 북단~잠실대교 북단)

내    용 : 운동·편의·휴식시설 정비 및 불량경관 개선

용역기간 : 2015. 6. 19 ~ 9. 16

계약금액 : 금36,393천원

용 역 사 : ㈜한림조경기술사사무소 대표 김경윤

Ⅱ		그간 추진경위

`15. 3. 30 : 「뚝섬 환경정비 개선사업」추진관련 생활체육단체 설명회 개최

`15. 4.  2 : 설계용역 추진 방침

`15. 4. 16 ~ 4. 21 : 설계용역 타당성 심사

`15. 4. 29 : 설계용역 발주

`15. 5.  8 : 설계용역 개찰 및 적격심사

`15. 6. 19 : 설계용역 계약 및 착수

`15. 6. 25 : 시의장 지역구 현안사업 보고

`15. 7. 10 ~ 8. 6 : 용역보고 (3회)

`15. 8. 20 : 용역 중간보고회 개최

`15. 9.  7 : 시의장 보고

`15. 9. 11 : 생활체육단체 설명회 개최

Ⅲ		준공기한 연기

용역기간

- 당초 : 2015. 6. 19 ~ 9. 16

- 변경 : 2015. 6. 19 ~ 9. 23(7일 연장)

연기사유 : 주민설명회(9.11)시 건의된 생활체육단체 요구사항 검토 반영에 따른 용역수행기간 부족

귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치계획

위와 같이 설계용역 준공기한을 연기하여 「뚝섬한강공원 환경정비 개선사업」추진에 만전을 기하고자 함. 끝.