함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(본부 청사 LED조명 교체 전기공사)

우리본부에서 시행하는 『본부 청사 LED조명 교체 전기공사)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 본부 청사 LED조명 교체 전기공사

나. 공사개요 : LED조명등 384등 설치, LED다운라이트 87둥 설치,

LED램프 12개 교체, 형광등 384등 철거, 다운라이트                             87등 철거

다. 도 급 자 : 경성전력(주) 대표 남기근

라. 계약기간 : 2015.06.29 ~ 2015.10.7.

마. 변경내용

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증․감
총공사비		93,826,363	92,505,170	감1,321,193
도급비	공사원가	36,351,085	35,150,000	감1,201,805
	부가가치세	3,635,108	3,515,000	감120,188
	계	39,986,193	38,665,000	감1,321,193
관급비		53,840,170	53,840,170

바. 설계변경 사유 : 보험료 정산

사. 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(시설장비유지비)

첨부  1) 설계변경 검토 보고서 1부

2) 설계변경 갑지 및 내역서 1부.

3) 설계변경 사유서  1부.

4) 합의서 1부.   끝.

주무관	나동안		행정운영과장	유정상		경영관리부장	09/16 정진일
협조자	주무관	허안숙		주무관	김윤환
시행	행정운영과-752	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3146-1132	/전송	02-3146-1132	/	nada0405@seoul.go.kr	/	대시민공개