문서번호	시설보수과-7328
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	09/16 조병준
협조
	★주무관		오연순

기성금 지급(1회)

(2015년 서울교 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

「2015년 서울교 보수공사」 기성금 지급(1회)

‘2015년 서울교 보수공사’ 위탁감독기관(서울시시설관리공단)으로부터 기성검사(감독)조서(제1회)가 접수되었기 검토후 처리코자 함

※ 시설관리공단 공사감독2처-14641호(2015.9.15.)

현   황

공 사 명 : 2015년 서울교 보수공사

계약업체 : 류진산업(주) 대표 장혜자

계약물량

- 포장보수공 : 개질아스콘 포장 63.87a, 도막방수(슈프림데크코트M6) 6,387㎡

- 신축이음: 중분대차수죠인트 236m, 신축이음덮개판교체 0.9㎡, 물끊기공 222m

- 콘크리트보수공 : 표면보수 236m, 단면보수 12㎡, 균열보수 169m

- 기타보수공 : 강재재도장 2.39㎡, 빗금도색 118㎡, 차선도색 266.3㎡ 등

계약금액 : 709,642,900원 (도급비)

계약기간 : 2015. 6. 17. ~ 2015. 12. 13.

기성(1차) 신청 내역

구 분	계약금액	기 성 내 역		누 계	비 고
		전회(기성)	금회(1차)
공 급 가 액	645,129,910	0	480,520,000	480,520,000
부가가치세	64,512,990	0	48,052,000	48,052,000
계	709,642,900	0	528,572,000	528,572,000	74.48%

검토결과

제출된 기성(감독)조서 검토결과 본공사 공종중 포장보수공(아스팔트 포장) 및 방수보수공(교면방수, 슈프림데크코트 도막방수)이 완료되었으며, 중분대차수죠인트 및 빗금도색이 진행중에 있어, 2015년 9월 15일 현재 실공정률이 약 80% 이상 진행된 것으로 판단되므로

시설관리공단으로부터 제출된 기성검사(감독)조서(제1회)에 의한 기성금 지급처리는 타당한 것으로 검토됨

- 금회 기성(1차)금 528,052천원(기성율 74.48%)

조치의견

상기 검토결과에 의거 ‘2015년 서울교 보수공사’ 기성금(1차) 지급과 관련한

후속절차를 계약부서에 의뢰후 처리코자 함.

붙 임 : 기성검사(감독)조서(제1회) 및 기성내역서 등 관련문서 1부.  끝.