투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기 의뢰(뚝섬한강공원 환경정비 개선사업 기본 및 실시설계용역)

1. 녹지관리과-3952(2015.9.16)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 발주하여 시행중인『뚝섬한강공원 환경정비 개선사업 기본 및 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 뚝섬한강공원 환경정비 개선사업 기본 및 실시설계용역

나. 용역기간 : 2015. 6. 19 ~ 2015. 9. 16

다. 용 역 비 : 금36,393,000원

라. 용 역 사 : ㈜한림조경기술사사무소 대표 김경윤

마. 용역 준공기한 연기

- 당초 : 2015. 6. 19 ~ 2015. 9. 16

- 변경 : 2015. 6. 19 ~ 2015. 9. 23

바. 연기사유 : 본 설계용역 주민설명회(9.11)시 건의된 생활체육단체 요구사항 검토 반영에 따른 용역수행기간 부족

사. 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원관리및운영, 한강공원시설물관리및개선, 한강공원 이용시설 보수정비, 시설비(100-401-01)

별첨 : 검토 보고서 1부. 끝.

	녹지관리과장
주무관	최수영		녹지관리과장	09/16 문경재
협조자
시행	녹지관리과-3957	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 녹지관리과	/
전화	02-3780-0849	/전송	02-3780-0745	/	csy0119@seoul.go.kr	/	대시민공개