투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	제3회 설계변경 시행(관내 포장도로 일상유지보수공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 관내 포장도로 일상유지보수공사에 대한 설계변경을(3회) 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 관내 포장도로 일상유지보수공사

나. 공사기간 : ‘15.03.30 ~ ‘15.12.31

다. 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 234a, 소파 포장복구 43a, 노면표시 25,143m

라. 도 급 자 : (주)개신건설  정진수

마. 변경사유 : 예산 재배정 및 단순물량 증·감

바. 변경내역                                             (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
도급비	공급가액	1,106,790,000	1,409,800,000	증)303,010,000
	부가세	110,679,000	140,980,000	증) 30,301,000
	계	1,217,469,000	1,550,780,000	증)333,311,000

사. 예산과목  :  도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임  1. 관내 포장도로 일상유지보수공사 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부

3. 제비율 검증 확인서 1부

4. 합의각서. 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	천석기		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	09/16 조병준
협조자	관리단속과장	이은엽		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-8939	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개