투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』추진일정 알림 및 협조요청

1. 공원조성과-11760호(2015.9.9.)호와 관련입니다.

2. 경춘선 복선 전철화(청량리역~춘천역) 사업으로 운행 중단된 광운대역~서울시계 구간의 철도유휴지 및 주변녹지를 활용하여 추진하고 있는 경춘선 폐선부지 공원조성사업(2단계)을 긴급 발주하여 업체 선정을 위한 공고 중으로 공사에 대한 향후 추진계획을 알려드립니다.

3. 아울러 공사의 조속한 시행을 위해 시공사 선정후 조속한 시일내에 공사에 착수계획이오니 노원구에서는 일정을 참고하시고, 공사 추진이 원활히 진행 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L)=1.1km, 면적(A)=53,860㎡

○ 공사기간 : ’15. 9.~’16.10. (착수일로부터 12개월)

- 1차 : 착수일로부터 10개월

○ 총공사비 : 86억원 ('15년 예산 80억원)

나. 추진현황 및 일정

○ 2015. 09. 09 : 공사시행 의뢰(푸른도시국 → 방재시설부)

○ 2015. 09. 11 : 본부장 방침 및 공사발주(방재시설부 → 재무과)

○ 2015. 9. 14 ~ 22 : 입찰공고(긴급)

○ 2015. 9. 22(화). 13:00 : 개찰

○ 2015. 10. 2. : 시공사 선정 완료

○ 2015. 10. 6  : 공사계약 및 착수

4. 노원구 협조사항 : 10월 초 조기 착수 계획으로 공릉지하보도 자전거포 이전,   공용건축물 협의가 조속히 이루어지고, 도시계획결정 및 보상 등의 절차가 적시에 추진될 수 있도록 협조하여 주시고, 노원구청(공원녹지과)에서는 관련부서에 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계) 현황. 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(공원조성과장),노원구청장(공원녹지과장)
주무관	고소영		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	09/16 임춘근
협조자
시행	방재시설부-12493	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 14층 서울시 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8732	/전송	02-3708-8756	/	ksy11033@seoul.go.kr	/	대시민공개