문서번호	시설과-55
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	급수부장
이연창		박기범	01/03 이상홍
협조

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 사고이월 계획

2014. 1.

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 사고이월 계획

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사(3차공사) 및 전면책임감리용역(3차분) 준공기한 연기와 관련 일부예산을 사고이월하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

○ 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

- 공사개요 : 터널D2200mm,L=1,416m(송수관 D1500mm,L=1,511m)

- 공사기간 : ’11.9.8 ~ ’14.4.5(3차분 ’13.1.1 ~ ’14.2.6)

- 시 공 사 : 중흥건설(주) 외 1개사

○ 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 전면책임감리용역

- 용역기간 : ’11.10.21 ~ ’14.3.3(3차분 ’13.1.1 ~ ’14.2.6)

- 용 역 사 : (주)건화

□ 2013년 예산/집행 상황

○ 예산집행 현황

(단위 : 원)

예산과목	예산현액	집 행 액			비 고
		원인금액	지출액	원인잔액(이월)
계	6,615,938,960	6,615,938,960	5,072,393,000	1,543,545,960
시설비 (도급비)	6,187,593,000	6,187,593,000	4,907,593,000	1,280,000,000
감 리 비	412,000,000	412,000,000	164,800,000	247,200,000
관 급 비 (레미콘)	16,345,960	16,345,960	0	16,345,960

□ 사업별 이월액 발생사유

○ 사업별 사고 이월액 발생현황

(단위 : 원)

사업구분	지출원인행위액	지출액	사고 이월액	비고
계	6,615,938,960	5,072,393,000	1,543,545,960
시설비 (도급비)	6,187,593,000	4,907,593,000	1,280,000,000
감 리 비	412,000,000	164,800,000	247,200,000
관급비 (레미콘)	16,345,960	-	16,345,960

○ 이월 발생사유(도급비) : 작업중지명령해제 이후 터널 및 기존 시설물 안정성 검토기간 종료시까지(2013.11.14.~12.20) 37일간 동안 공사가 지체되어 준공기한(3차분) 연기

○ 이월 발생사유(감리비) : 작업중지명령해제 이후 터널 및 기존 시설물 안정성 검토기간 종료시까지(2013.11.14.~12.20) 37일간 동안 동 전면책임감리용역이 지체되어 준공기한(3차분) 연기

○ 이월 발생사유(관급비) : 안전사고 발생에 따른 작업중지 명령에 의한 공사지연

□ 행정사항

○ 공사관리에 차질이 발생치 않도록 사업별 발생 원인잔액(사고 이월액)에 대하여  2014년으로 사고이월 조치하여 공사에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1) 사고이월 관련 보고서  2부.

2) 관급자재(레미콘) 연기 변경계약 공문 1부. 끝.