문서번호	토목부-19512
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널건설과장	토목부장
강철규	권혁대	09/16 노우성

“방화대교 남단 접속도로 건설공사 전면책임감리용역”

전면책임감리용역 변경 검토보고

2015. 9.

도시기반시설본부

(토  목  부)

전면책임감리용역 변경 검토보고

「방화대교 남단 접속도로 건설공사 전면책임감리용역」의 감리원 추가투입 조정에 따른 설계변경 검토보고임

1		관련근거

❍ 삼보 2015-968호(2015. 9. 3.) 설계변경 요청

2		용역개요

❍ 공 사 명 : 방화대로 남단 접속도로 건설공사

❍ 규    모 : 도로개설 B=5.75~18.0m, L=3,021m (교량 756m, 터널 949m)

❍ 용역기간 : 총괄 2005.10. 5. ∼ 2015.11.30. (12차 2015. 1. 1. ~ 2015.11.30.)

❍ 용 역 비 : 총괄 6,433백만원(12차 719백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜삼보기술단

3		감리단 제출내용

❍ 주요내용 : 공사 공정 추진에 따른 감리원 추가투입 조정

· 추가 투입인원 : 감리사(토목) 1명, 감리사보(토목) 1명

❍ 총괄 및 12차 변경내용

-  감리원 추가투입

(단위 : 개월)

구 분	당 초	변 경	비 고
감리사	-	8.13	증 8.13개월(토목)
감리사(야간)	-	1.04	증 1.04개월(토목)
감리사보	-	7.04	증 7.04개월(토목)
감리사보(야간)	-	0.63	증 0.63개월(토목)
감리사보(휴일근무)	-	1.40	증 1.40개월(토목)

-  용역비 변경현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총괄	6,433,000,000	6,645,500,000	증 212,500,000
12차	719,200,000	931,700,000	증 212,500,000

4		보고자 검토 및 조치의견

❍ 감리단 보고내용과 같이 본 공사 공정에 따라 감리업무 수행에 필요한 감리원 추가 투입이 타당함으로 전면책임감리용역(총괄 및 12차분) 설계변경을 하고자 함.

❍ 총괄 및 12차 변경계약 내용

(단위 : 원)

구 분	용 역 비		용 역 기 간		비 고
	당초	변경	당초	변경
총 괄	6,433,000,000	6,645,500,000	2005.10. 5. ~ 2015.11.30.	변경없음
12 차	719,200,000	931,700,000	2015. 1. 1. ~ 2015. 11.30.	변경없음

붙  임 : 감리단요청서 및 설계변경 내역서 1부.  끝.