문서번호	시설관리과-22327
결재일자	2015.9.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		최희권	09/16 우종근
협조

공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2015. 9.

남부수도사업소

시설관리과

1. 제    목 : 공사실정보고에 의한 사업소 검토의견 보고

2. 관련근거

공사감독2처-11007(2015.7.24.)【부지임대료 검토보고 제출 】

공사감독2처-12274(2015.8.13.)【휴일작업 승인 요청】
공사감독2처-12725(2015.8.21.)【휴일작업 승인 요청】

공사감독2처-13197(2015.8.28.)【준공기한연기 검토보고서 제출】

공사감독2처-13198(2015.8.28.)【노후밸브교체외 2건에 대한 검토보고 제출】

공사감독2처-13441(2015.9.01.)【분기구 추가 발견에 대한 검토보고 제출】

공사감독2처-14026(2015.9.08.)【강관철거비 설계반영외 1건에 대한 검토보고 제출】

3. 공사현황

가. 공 사 명 : 신길주유소앞 ~ 우신초사거리 간 송배수관 정비공사(비굴착갱생)

나. 공사개요 : D=800㎜, L=1,000m

다. 공사기간 : 2014. 10. 27 〜 2015. 11. 21

라. 계약금액 : 1,267,166,550원

마. 시 공 사 : 장위토건  대표 이강복

바. 감 독 자 : 서울시시설관리공단  담당 손성국

4. 시설관리공단 보고 및 사업소 검토의견

연번

제목

시설관리공단 보고내용 및 조치의견

사업소 검토의견

비고

가

부지임대료

검토보고

□ 부지임대료 검토 내용

⃝ 부지임대 소요면적 검토

- 작업구 토공량 소요면적 산출 : 84㎡

- 가시설 적재 소요면적 산출 : 26㎡

- 필요부지면적 : 84+26=110㎡

장비(백호, 덤프)는 임대 사용으로 운용면적 적용 불가

⃝ 부지임대 소요기간 산정

- 관급자재청구및실작업기간(2015. 4 ~ 2015. 9) 산정 : 5개월

⃝ 부지소요면적에 따른 부지임대료 적용 부지임대료 :

- 소요면적(㎡)×공시지가×50/1,000×공사기간(월)

면적 (㎡)	공사지가 (원/㎡)	비율	1개월 임대료(원)	공사기간 (월)	부지 임대료
110	440,600	0.05	201,941	5	1,009,708

⃝ 중간집하장 운반비 산정

- 현장에서 중간집하장까지 운반비용은 계약단가 적용

〇 검토의견 : 원안 승인

- 검토결과 : 적정함.

※단, 신공정 및 강우로

인하여 준공기한

(2015.11.21.)이

연기됨에 따라 부지

임대 소요기간이

소요됨을 감안 추가

검토 후 적용

나

준공기한연기

검토보고

□ 준공기한 연기 요청 내용

당초 : 2015.10.27. ~ 2015.09.12

변경 : 2015.10.27. ~ 2015.11.21

사유 : 신공정 발생 및 강우일수 반영에 따른 준공기한 연기

〇 검토의견 : 원안 승인

- 검토결과 : 적정함

별첨 참조

다

노후밸브교체

외2건에 대한

검토보고

□ 노후밸브교체외 2건 현황

⃝ 신길동 221-34앞 노후밸브 교체(300mm*1개소)

당초 : 미반영,  변경 : 300mm*1개 밸브교체 반영

⃝ 라인스토핑 및 밸브설치를 위한 야간공사 시행 승인 요청

⃝ 구형변실 슬래브 설치방법 변경

위치 : 작업구 NO10, NO8, NO3, NO1, (600분기점) 총5개소

변경내용: 설치시간 단축 및 구형변실슬래브 품질확보을 위해

PC 슬래브를 제작 설치

〇 검토의견 : 원안 승인

- 검토결과 : 타당함

※ 구형변실 슬래브

설치는 구조검토 및

안전성등을 감안

제작 PC슬래브

품질검사 철저

연번	제목	시설관리공단 보고내용 및 조치의견	사업소 검토의견	비고
라	분기구 추가발견에 대한 검토보고	□ 분기구 추가발견에 대한 검토보고 제출 ⃝ 위치 : 작업구 4번에서 북 방향 10m, 20m 지점 ⃝ 내용 : 정비관로 중 분기구(250mm) 지점이 2개소 추가 발견됨 ⃝ 검토의견 : 보강용접하여 분기구 불용관 폐쇄 조치	〇 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 적정함
마	강관철거비 설계반영외 1건	□ 강관 철거비 반영외 1건 ⃝ 기존관 절단 시 발생된 강관철거비 반영 ⃝ 5번 작업구 터파기 인력시공 반영 당초 : 기계터파기, 변경 : 인력터파기 사유 : 지하지장물(하수관)로 인한 기계굴착 불가	〇 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 타당함
바	휴일작업 승인 요청	□ 휴일작업 승인 요청 ⃝ 공사감독2처-12274(2015.8.13.) 2015.8.14.(금).~8.16(일) (22:00 ~ 06:00) ⃝ 공사감독2처-12725(2015.8.21.) 2015.8.23.(일) (22:00 ~ 06:00)	〇 검토의견 : 원안 승인 - 검토결과 : 적정함 ※ 휴일작업 시 비상연락망 체계 유지 및 현장안전 관리 철저

5. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 서울특별시시설관리공단에 통보하여 공사 시행에 차질이 없도록 만전을 기하고자 합니다.

별첨 : 관련현황 각 1부.  끝.