투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 교통안전표지 유지보수 공사 제4차 공사기간 변경 승인

1. 항상 남부도로사업소 교통업무 및 시정 발전을 위해 힘 써 주심에 진심으로 감사를 드리며, 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 계약체결하여 공사시행중인 『교통안전표지 유지보수공사(2015연간단가)』의 제4차 작업지시 관련 감리사인 ㈜트래픽스 TR-5-0909호(2015.09.11.)의 제4차 공사기간 변경 요청 및 실정보고에 따라 변경 승인 통보하오니 공사시방서 등 관련규정에 따라 공사 시행 및 안전관리에 만전을 기하여 작업 수행하여주시고, 공사완료 후 설계도서와 함께 공사 전, 중, 후 사진을 첨부하여 공사완료보고서를 제출하여주시기 바랍니다.

3. 아울러, 교통안전시설 감리용역업체에서는 공사시행에 따른 감리업무에 철저를 기해 동 사업이 원활히 추진될수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 공사기간 변경 승인내역

구 분	교통안전표지 유지보수 공사(2015연간단가) - 제4차 작업지시
작업지시내역	총 69개소 (서초프라자 외 68개소) 붙임 참조
작업기간	당초 : 2015.08.21. ~ 2015.09.12. 변경 : 2015.08.21. ~ 2015.09.18.
계약업체	㈜ TNG건설 대표 임준기
감리업체	㈜ 트래픽스 대표 김희수

5. 기타사항

가. 굴착 및 교통통제 등이 필요시 해당 관계기관과 협의 및 홍보

나. 교통 및 안전관리 철저, 천재지변 및 기타 등의 사유로 공사기간 지연시 협의.

끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	(주)TNG건설 대표 임준기 귀하,(주)트래픽스 대표 김희수 귀하
주무관	박종근		기전과장	09/16 유재옥
협조자	주무관	허송욱
시행	기전과-4337	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3284-5458	/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개