문서번호	시설과-6677
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		代김윤철	전결 09/16 이용태
협조
	조경팀장		남상국

간데메공원 외 1개소 시설재정비공사 폐기물처리 용역

준공기한 연기 검토보고

2015. 8

중부공원녹지사업소

(시설과)

간데메공원 외 1개소 시설재정비공사 폐기물처리 용역

준공기한 연기 검토보고

“간데메공원외 1개소 시설재정비공사 폐기물처리 용역” 시행과 관련 중랑캠핑숲 시설재정비공사 공기 연장에 따라 폐기물처리 용역에 대한 준공기한을 연기하고자 함

용역개요

❍ 용 역 명 : 간데메공원외 1개소 시설재정비공사 폐기물처리 용역

❍ 용역기간 : ‘15.6.22 ~ 9.19

❍ 도 급 액 : 15,825천원

❍ 도 급 자 : ㈜대아이디아이 (대표: 신은식)

검토사항

❍ 중랑캠핑숲 시설재정비 공사 준공기한 연기(시설과-6032,‘15.8.25)

- 공사기간 : 2015.5.29. ~ 11.15(당초:2015.5.29.~8.28)

❍ 준공기한 연기(57일)

- 당초 : 2015.06.22 ~ 09.19

- 변경 : 2015.06.22 ~ 11.15

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토결과

❍ 본 공사의 공기연장에 따른 폐기물처리용역 공기연장 건으로, 상기와 같이 용역기간을 연기하여 폐기물 처리에 철저를 기하고자 함

붙임 : 준공기한 연기 검토내용 1부.  끝.