문서번호	토목부-19653
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	09/17 노우성

준설작업구 재설치에 따른 검토보고

(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사)

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

준설작업구 재설치에 따른 검토보고

- 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 -

기존 도로의 포장면이 상승(12∼18㎝)함에 따라 수로암거 상부에 설치(개봉동 306-12외 1개소)된 준설 작업구가 아스콘 포장에 매몰되어 유지관리부서(구로구)로부터 원상복구 요구가 있어 이에 대한 검토보고임

관련근거

○ 준설작업구 원상복구 요청(구로구 치수과-7105호, ‘15. 5.29.)

공사개요

○ 위 치 : 구로구 개봉동234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 규 모 : 지하차도 설치 폭4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2 ~ 3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015.10.31.

○ 총사업비 : 668억원

○ 도 급 사 :(주)케이에스씨건설외 1사

검 토

○ 도로계획고 변경으로 인하여 기존 도로의 포장면이 상승(12∼18㎝)함에 따라 수로암거 상부에 설치(개봉동 306-12외 1개소)된 준설용 작업구가 아스콘포장에 매몰되게 되므로 인상 또는 재설치가 필요하며, 이에 소요되는 비용이 도급계약 내역에 미반영되어 있음

- 수량 현황 : 준설작업구(규격 : B=2.0m x L=3.0m) 2개소

신규 단가 적용율 검토

○ 신규단가는 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정) ②항에 의거 설계가에 협의율(강제) 82.868%적용(65.736%+ 100% / 2 = 82.868%)

공사비 증․감

(단위 : 원)

공 종	규격	단위	수량	금 액	비고
1, 장비투입구 설치비				10,195,754
장비투입구 뚜껑제작설치	B=2.0 x L=3.0	개소	2	6,261,960
고무판설치	100x5T	M	20	59,380
철근가공조립	보통	Ton	0.241	72,072
합판거푸집	매끈한마감	M2	3.10	414,356
무숙축콘크리트타설	초속경	M3	1.59	1,892,978
강관동바리	암거용	공M3	22.03	351,774
아스팔트절단		M	11.6	30,994
콘크리트절단		M	11.6	33,825
아스팔트깨기	소형장비사용	M3	1.22	222,302
콘크리트깨기	소형장비사용	M3	1.51	372,223
특럭탑재형크레인	10ton	hr	10	483,890
2, 자재비				258,605
철근	HD 13mm	Ton	0.248	110,976
레미콘		M3	1.60	147,629
직접공사비				10,454,359
제경비				1,645,641
공급가액				12,100,000
부가가치세				1,210,000
도급공사비				13,310,000
폐기물처리비				154,000
총공사비				13,464,000

감리단 검토 의견

○ 도로계획고 변경으로 인상이 필요한 남측도로 준설작업구(2개소)에 대해 현장 합동조사 결과 부식정도가 심해 구조적 안정성 확보를 위하여 부식된 준설작업구 전체를 철거 후 재설치하는 것이 타당하다고 판단됨.

○ 증액되는 공사비 13,464천원에 대하여는 본부 승인 후 추후 설계변경에 반영하고자 함.

조치계획

○ 준설작업구 인상비 반영을 위한 실정보고에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인하고 증액되는 공사비(13,464천원)에 대하여 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  :  감리 검토의견서 1부.  끝.