문서번호	토목부-19573
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	09/17 노우성
협조

가시설 설치 검토보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

도시기반시설본부

(토 목 부)

가시설 설치 검토보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

공사중 교통처리계획에 따라 종점부 우수관의 설치위치 및 공법을 변경(일반터파기→간이흙막이)코자 검토 보고하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

○ 공사규모 : 도로확장 폭 4 → 6차로, 총 연장 800m
지하차도 L=316m(BOX 300m, 옹벽 16m)

○ 공사기간 : 2010.10 ~ 2017.12

○ 도 급 비 : 30,633백만원

○ 시 공 사 : 북일종합건설㈜외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜한국해외기술공사 외 1개사

□ 현   황

○ 위  치 : STA.0+720∼0+807(우)

○ 개  요 : L=87.0m (Φ600)

□ 검토내용

○ 종점부 우수관 부설

- 설계시 토공작업 완료후 우수관부설

- 3단계교통처리계획시 우수가 STA.0+700 지점에 집중

- STA.0+720∼STA.0+807구간 기존도로부에 우수관 조속 시공 필요

○ 우수관 설치위치 및 방법

- 설계시 보도구간에 우수관 매설토록 되어 있음

- 보도구간에 지장물(통신관로, 상수도관, 가로수 등)이 혼재되어 있고 보도폭이 협소(B=1.5m)하여 차도구간에 가시설 설치후 부설 필요

□ 설치공법 비교

구 분	터파기 시공(설계)	간이흙막이 설치(변경)
상세도
시공 순서	-구배 1:0.3 으로 터파기 후 모래포설, 관부설, 되메우기 및 다짐 순으로 시공	-직각으로 터파기 후 간이흙막이 (TS판넬)설치, 모래포설, 관부 설, 되메우기, 간이흙막이 해체 및 다짐 순으로 시공
장·단점	-공사비가 저렴하다 -시공이 간편하다 -터파기 및 되메우기 수량이 많아진다 -토피고가 높을수록 공사구간이 넓어져 공사구간이 많이 필요 하여 도심지에는 부적합함. -굴착단면이 협소하여 안전시공 우려	-토피고에 상관없이 간이흙막이 (TS판넬)설치로 공사구간이 많 이 필요없며, 도심지에 적합함 -터파기 수량이 적어 많은 공간이 필요하지 않다 -공사비가 다소 고가 -가시설 설치공사로 안전시공가능
공사비	23,100원/m	93,431원/m
적용(안)		◎

□ 감리단 검토의견

○ 종점부 우수관((Φ600) 부설 시기는 배수시설 등을 감안할 때 3단계 교통처리시 시공하는 것이 적정함

○ 우수관 부설공법은 지장물 및 보도폭 협소를 감안하여 신속한 교통처리를 위해 간이흙막이공법으로 변경 적용하는 것이 타당함.

○ 공사비 현황

(금액단위 : 천원)

공 종	당 초	설계가 (100%)	협의율 (84.736%)	낙찰율 (69.472%)	비고
직접공사비	14,066	55,574	49,253	42,931
간접공사비	4,568	17,730	15,691	13,620
도급액	18,634	73,304	64,944	56,551
관급자재비	285	114	114	114
폐기물처리비	-	979	979	979
공 사 비 계	18,919	74,397	66,037	57,644
증 · △감		55,478	47,118	38,725

□ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규 공종에 대하여 낙찰율 69.472% 적용

○ 도급자 : 신규 공종에 대하여 100% 반영 요청

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨

○ 금회 실정보고 건은 공사 시행 협의하였으나 협의가 되지 않아 부득이 신규공종에 대하여 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 강제협의율(84.736%)을 적용코자 함.

- 개략공사비 : 증)47백만원

붙 임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 공사시행협의문서사본 2부.  끝.