문서번호	도로보수과-8983
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	09/17 조병준
협조

구로세무서 앞 중앙버스정류소 이설공사 시행 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

구로세무서 앞 중앙버스정류소 이설공사 시행 계획

2015 중앙버스 전용차로 흐름개선을 위한 구로세무소 앞 중앙버스정류소 이설 사업비가 재배정되어 시행계획을 검토 보고 드림.

관련근거

중앙버스전용차로 흐름개선 사업비 재배정 시행 - 교통운영과-15545(‘15. 08. 11)

- 배정액 : 332,951천원

중앙버스전용차로 흐름개선 사업비 추가 재배정 시행 - 교통운영과-17880(‘15. 09. 14)

- 배정액 : 94,190천원

현    황

위  치 : 영등포구 경인로 구로세무서 앞

공사개요

- 기존 상·하행선 버스정류장(영등포등기소.구로세무서)을 좌측으로 약 60m 이설

- 아스팔트 포장 5.6a, 보도포장 5.4a, 경계석 설치 370m, 버스정류장 쉘터 및    휀스 이설

예산재배정 : 427,141천원(교통운영과, 중앙버스전용차로 흐름개선)

시행방법

- 토목공사 : 건설산업기본법시행령 7조에 의한 건설업종중 토목공사업을 등록    하고 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체를 대상으로 제한경쟁 입찰    실시【도급비 271,880천원】

- 교통처리 용역 : 시도상 20일 이상 도로점유에 따른 교통소통처리계획 수립을    위한 별도 용역 발주(수의계약)【도급비 22,000천원】

- 폐기물 처리용역 : 폐기물 물량 100톤 이상으로 별도 용역 발주(수의계약)

【도급비 11,110천원】

- 쉘터 이설 : 서울시와 중앙버스전용차로 버스정류장 쉘터 및 휀스 관리에

대한 협약을 맺고 있는 JC데코에서 이설(수의계약)【도급비 58,551천원】

향후 계획

2015년 9월 : 공사 및 용역발주

2015년 10월 : 교통처리 규제 심의

2015년 10월 : 공사계약 및 착공

2015년 12월 : 공사준공

붙임문서 : 1. 설계도면 1부.

2. 관련공문 2부. 끝.