문서번호	도로보수과-9209
결재일자	2015.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	북부도로사업소장
박성록	代이화신	09/17 노영석

『2015년 노후포장도로 정비공사(1구역)』 설계변경(1회) 검토 보고

2015. 9.

북부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(제1회) 검토 보고

- 2015년 노후포장도로 정비공사(1구역) -

우리 사업소에서 시행중에 있는『2015년 노후포장도로 정비공사 (1구역)에 대한 차열성 도로포장 시험시공 및 공종별 물량 변경을 위한 설계변경 검토 보고 사항임

공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 노후포장도로 정비공사(1구역)

○ 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 A=831.4a

○ 공사기간 : 2015.05.26 ~ 2015.12.31

○ 공사금액 : 553,070,900원

○ 도 급 자 : ㈜스카이건설 대표 김성기

설계변경 사유

○ 시장지시사항 제692호(‘14.7.15)차열성 도로포장 시험시공

- 일본차열성 포장 (A=1,500㎡, L=90m,B=16m)

- 국내 차열성 포장 (A=640㎡, L=14~26m,B=16m)

○ 상수도 공사예정(동일로)으로 노후포장 구간 변경(북악산길)

- 동일로 (중계역~노원구민회관) L=790m, A=122.5a

(2016년 상수도 공사예정으로 금회포장구간에서 제외)

- 북악산길 (미아구름다리~ 성북구민회관 추가 포장 시행 )

L=2,000m, A=173.5a

○ 공종별 물량 변경 및 북악산길 급경사 구간 그루밍 설치 (관급A=3,530㎡)

설계변경 내역

○ 공사비 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		1,962,070,900	2,235,070,900	증) 273,000,000
도급비	공급가액	502,791,728	696,709,091	증) 193,917,363
	부가가치세	50,279,172	69,670,909	증) 19,391,737
	계	553,070,900	766,380,000	증) 213,309,100
관 급 비		1,237,936,000	1,274,202,000	증) 36,266,000
이 전 비		171,064,000	194,488,900	증) 23,424,900

○ 주요공종 변경물량

공 종	규격	단위	수 량			증 ․ 감	비 고
			당 초	변 경
차열성포장시험시공 (국외:일본)	2액형mma 수지	㎡	-		1,500	증1,500
차열성 포장시험시공 (국내)	1액형수용성 mma수지	㎡	-		640	증 640
절삭후(5cm) 아스팔트덧씌우기	야간	a	195		341.7	증146.7
절삭후(10cm) 아스팔트덧씌우기	야간	a	344.8		214.5	감130.3
그루밍설치 (관급)	9×4×51	㎡	-		3,530	증3,530

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 노후포장 정비를 위한 공종별 물량변경과 차열성 포장 시험시공 추가, 관급자재(그루밍) 추가 구입 등 금회 배정된 예산 (273백만원)범위내에서 설계변경 시행하여 노후포장 공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 설계변경도서(1회) 1부.   끝.