문서번호	보건의료정책과-8660
결재일자	2015.9.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공공보건팀장	보건의료정책과장
김화실		이향숙	09/17 박유미
협조

- 보건소 시민건강관리센터 조성  -

서비스 디자인 용역 기간 연장 계획

2015.  9

시 민 건 강 국

(보건의료정책과)

-  보건소 시민건강관리센터 조성  -

서비스 디자인 용역 기간 연장 계획

「보건소 시민건강관리센터 조성」서비스 디자인 용역 기간 중 메르스 위기상황 발생으로 보건소 사업 추진 소요 에연장을 아래와 같이 추진하고자 함.

□ 관련근거

○ 보건소 시민건강관리센터 시범 운영을 위한 서비스 디자인 용역 시행계획(보건의료정책과-8631, ‘15.3.24)

□ 용역개요

○ 수행기관 : ㈜ 사이픽스 (대표 이경미)

○ 계약기간 : ‘15. 4. 27 ~ 9. 30일까지(5개월)

○ 계약금액 : 금68,599,300원(금육천팔백오십구만구천삼백원)

○ 과업내용

- 시민건강관리센터 조성에 서비스 디자인 프로세스 및 방법론을 적용하여 보건소 이용자 및 내·외부 이해관계자 니즈 파악

- 시민 중심의 보건소 ‘시민건강관리센터’ 조성을 위한 서비스 디자인 적용

- 유사 사례 파악 및 도입방안 검토·제안, 지속적 운영 지원(자문 및 기술지원) 등

□ 추진현황

○ 보고회 2회 : 착수(5. 22, 금), 중간(9. 9, 수)

○ 시범보건소별 코크리에이션 워크숍 2회 : 6월~8월

○ 시민건강관리센터 조성 공간배치(안) 등 마련 : 8월~9월

○ 대기시스템 구성(안) 및 서식지 재디자인 : 9월

□ 용역기간 연장

○ 수행기간  : 5개월  ⇒ 5개월 15일(15일 연장)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘15. 4. 27~ 9. 30	‘15. 4. 27 ~ 10. 15	15일 연장
계약금액	금68,599,300원(금육천팔백오십구만구천삼백원)		변동없음

○ 연장사유

- 메르스 감염병 위기 대응 업무 집중추진(5월말~7월)으로 보건소 일상업무 잠정 중단됨에 따라 보건소 이해관계자 업무참여 및 의사결정 지연

- 용역기간 연장을 통해 내실 있는 결과물 도출하고자 함

○ 지체상금 : 부과없음
( “제3자– 메르스 감염병 위기상황 발생“에 의한 불가항력적 사유)

□ 과업내용 조정

○ 시공 후 감리 실시하도록 명시된 과업 삭제

구 분	당 초	변 경	비 고
과업내용 (공사 후 감리부분)	제시된 공간 배치에 대한 계획 설계(안)이 현장에서 시공 등 반영 되도록 실행 및 감리 등 실시 - 시민건강관리센터 “서비스 디자인 적용”에 관한 사항 총괄 실행하고 감리	삭 제	감리를 위한 선행 조치사항 미이행
계약금액	금68,599,300원(금육천팔백오십구만구천삼백원)		변동없음

○ 조정사유

- 메르스 위기상황 발생으로 보건소 일상업무 차질로 인한 센터 조성공사
지연되고 시범보건소별 완공기일 편차 있을 것으로 예상되는 등 선행조치사항 이행 지연

- 시범보건소별 공사 조성 및 감리 조건에 서비스 디자인 적용에 관한 사항을 사이픽스에서 진행하도록 명시하여 목적달성 가능

- 용역기간 종료 후에도 서비스 디자인 적용 관련 자문․기술지원하도록
과업내용에 명시하고 있으므로, 공사 완료 후 서비스 디자인 적용에 관한 감리
등 자문 및 기술지원 가능

□ 향후 추진일정

○ ‘15. 9. 22(화)   : 변경계약(기간 연장) 의뢰(재무과)

○  ‘15. 10. 8(목) 17:00(예정) : 용역 최종보고회 개최

○  ‘15. 10. 15(목) : 용역준공 및 사업비 정산

□ 행정사항

○ 시범보건소 및 용역기관 대상 과업내용 및 용역기간 조정 통보

○ 서비스 디자인 적용 감리에 관한 사항은 사이픽스에서 진행하도록 시범보건소에 요청

붙임  1. 합의각서 1부.

2. 과업내용서(수정) 1부. 끝.