함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최 ［도봉산입구 ~ 도봉파크빌 아파트간 송배수관 정비공사］

우리 사업소에서 시행중인 “도봉산입구 ~ 도봉파크빌 아파트간 송배수관정비공사”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증․감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 도봉산입구 ~ 도봉파크빌 아파트간 송배수관정비공사

○ 주요 변경물량

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
공 종	*******************	****	****	*****m
	*******************	****	****	****m
	***********************	**개소	****	*******
	***********************	****	****	*******

○ 계약기간 : 2015.06.05 ~ 2015.11.11

○ 도급비 변경내역

- 당   초 : *************

- 변경 후 : ****************************

○ 계약업체 : (주)비취건설  대표 김태성

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2015. 09. 17(목) 16:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설6급 이문성, 시설7급 김종필, 시설7급 강대유, 시설7급 유광창

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 심의신청서 1부.

2. 설계변경 보고서(공단) 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	최용진		급수운영과장	09/17 김수영
협조자	주무관	김종필토		주무관	유광창		주무관	강대유
주무관	이문성
시행	급수운영과-17985	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개