함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사)

1.  우리 정수센터에서 시행중인 『2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사』를 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 토목,건축 시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : 에스이건설(주) 대표 서상진

다. 공사규모 : 콘크리트균열보수161㎥, 석축쌓기68.48㎡, 벤치플륨관설치50m,

하수관설치18.5m, 약품동 바닥단면보수46.7㎡ 등

라. 계약기간 : 2015.04.28 ~ 2015.11.30

마. 설계변경 금액 내역                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	52,089,679	65,000,000	12,910,321

바. 설계변경사유 : 신규공종 및 시공물량 증․감 발생, 보험료 정산

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.  4. 합의서 1부. 5. 설계심의검토보고서 1부,

6. 제비율 1부.  끝

주무관	김우승		주무관	代유혜영		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	09/17 차윤기
협조자
시행	정수시설과-4057	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화		/전송		/		/	대시민공개