투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[서울혁신파크 소규모 건축물(4동, 8동) 리모델링 전기공사]

1. 설비부-11539(2015.9.17.)호와 관련입니다.

2.『서울혁신파크 소규모 건축물(4동, 8동) 리모델링 전기공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울혁신파크 소규모 건축물(4동, 8동) 리모델링 전기공사

나. 도 급 자 : 주영건설(주) 대표 서봉원

다. 준공기한 연기의뢰 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	‘15. 06. 19. ~ ‘15. 09. 30.	‘15. 06. 19. ~ ‘15. 11. 30.	금액변동 없음

라. 귀책소재 및 연기사유

1). 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2). 지체상금 부과여부 : 미부과

3). 연기사유 : 선행공종인 건축공사의 공사지연에 따른 전기공사 기간 연장

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.

3. 준공기한 연기 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		환경설비과장	유병기		설비부장	09/17 박기형
협조자
시행	설비부-11563	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	대시민공개