문서번호	급수운영과-18004
보존기간	년
결재일자	2015.9.17.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		급수운영과장
최용진		09/17 김수영
협 조

설계변경 심의결과 보고

［도봉산입구 ~ 도봉파크빌 아파트간 송배수관 정비공사］

북부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의결과 보고

우리 사업소에서 시행중인 “도봉산입구 ~ 도봉파크빌 아파트간 송배수관 정비공사” 에 대하여 정산결과 시공물량 증 ․ 감 발생으로 인한 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

1. 공사 개요

가. 공 사 명 : 도봉산입구 ~ 도봉파크빌 아파트간 송배수관 정비공사

나. 공사개요

구 분	규격	공 사 개 요		비 고
		당 초	변 경
********	**********	****	****	******
********	**********	****	****	*****
***********	**********	****	****	*******
***********	**********	****	****	*******

다. 공사기간: 2015.06.05 ~ 2015.11.11

라. 도 급 비

<총 부기금액 >

- 당초 : 금************

- 변경 : 금****************************

마. 도 급 자 : ㈜비취건설   대표 : 김태성

2. 심의회 개최현황

가. 심의일정 : 2015. 09. 17. 14:00

나. 심의장소 :  급수운영과 사무실

다. 심의위원장 : 급수운영과장

라. 심의위원 : 시설6급 이문성,시설7급 강대유,시설7급 김종필,시설7급 유광창

3. 심의 내용

가. 물량변동의 적정성 여부

나. 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

다. 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과(별첨)

가. 설계변경의 타당성 : 타당함

나. 제잡비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

다. 계약변동(증, 감)물량 계약단가 낙찰율 적정 적용 여부 : 해당없음

라. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수함

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적정함

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 심의 결정서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.    끝.