문서번호	토목부-19674
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목설계과장	토목부장
김종혁	이승우	09/18 노우성

준 공 기 한  연 기  보 고

강변북로(성산대교~반포대교) 확장공사 환경영향평가용역

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도로계획과-2190 (2012.2.24)	도로계획과	과업추진여부	과업중지

2015. 9.

도시기반시설본부

(토목부)

준공기한 연기 보고

■ 사업개요

◦ 사 업 명 : 강변북로(성산대교~반포대교) 확장공사 환경영향평가용역

◦ 규    모

- 강변북로(성산대교~반포대교) 확장 및 구조개선 (L=11.6km)

1) 기타 구간 (2011년 2월 기본설계 완료)

∙ 강변북로 확장(성산대교~양화대교) : 도로확장 폭 8차로→10차로(L=1.8km), 성산대교 북단 램프구조 개선(L=0.7km)

∙ 강변북로 구조개선(한강대교~반포대교) : 동작대교 및 반포대교 북단 연결로 개선(L=3.0km)

2) 턴키구간 (2012년 2월 턴키 실시설계 중지)

∙ 하저터널 건설(양화대교~원효대교) : 폭 4차로(L=4.9km)

3) 지하화 구간 (2012년 2월 기본설계 완료)

∙ 용산국제업무지구 구간 지하화(원효대교~한강대교) : 기존 강변북로 지하화 폭 8차로(L=1.9km), 지역간 연결도로 신설 : 폭 4차로(L=2.1km)

◦ 용역기간 : ′10.7.13. ~ ′15. 9. 29.

◦ 도 급 비 : 464백만원

◦ 용 역 사 : (주)수성엔지니어링

■ 준공기한 연기

◦ 당    초 : ′10. 7. 13. ～ ′15.  9. 29.

◦ 변    경 : ′10. 7. 13. ～ ′15. 12. 24.

◦ 지체상금 : 미부과

◦ 귀책부서 : 도시기반시설본부

■ 준공기한 연기 사유

◦ 당초 용산국제업무지구계획 미확정 및 강변북로(성산~반포) 확장 사업계획 확정시까지 환경영향평가를 중지하라는 주관부서(도로계획과)의 조치계획에 따라 준공기한을 연기하고 과업을 중지함.

◦ 용산국제업무지구계획이 해제되었으나 이에 따른 강변북로(성산~반포) 확장 사업에 대한 주관부서(도로계획과)의 향후 조치계획이 수립되지 않아 과업을 재개하기 어려워 준공기한을 연기하고자 함.

■ 조치의견

◦ 위와 같은 사유로 준공기한을 당초 ′15. 9. 29.에서 ′15. 12. 24.로 연기하고자 함.

붙임 : 용역업체 준공기한 연기 요청서 1부.  끝.