의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도설비부-9620
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		차량과장	도시철도설비부장	도시철도국장	도시기반시설본부장	결재
장재순		황영일	정찬웅	형태경	09/18 고인석
협 조

제 목	의원 요구자료 제출 (요구번호 1691번, 성중기의원, 교통위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

성중기의원(교통위원회, 새누리당)

1691

〔지하철 9호선〕

1. 2015년 8월말 기준 기 계약중인 차량 제작 대수 및 진행현황, 추후일정

2. 위 기 계약건수 이외 이후 추가 차량 구매계획(총 대수 및 구매방식 등)

1. 2015년 8월말 기준 기 계약중인 차량 제작 대수 및 진행현황, 추후일정

○ 차량 제작 대수 : 70량

- 차량 조기투입을 위하여 현재 운행중인 차량과 동일 사양 편성으로 우선 제작

· 4량 8편성 32량 우선 제작(′16. 9월 이전 초도 투입)

- 이후 6량 증결차량 제작 추진(신규 6량 1편성, 증결 4량→6량 16편성 32량)

○ 진행현황

- `15.5.29 : 9호선 전동차 구매계약 체결(계약업체 : 현대로템)

- `15.7,20 : 형식변경신고(제작사→국토교통부)

· 차량조기 투입을 위해 현재 운행중인 차량과 동일한 사양으로 우선 제작분 32량

- `15.7.30 : 우선제작 32대분에 대한 도면 승인 완료

- `15.8.19 : 전동차 제작감독용역 체결(계약업체 : 케이알이앤씨)

- `15.5.29 ~ 현재 : 차량제작사 장기 소요 자재 발주 및 납품자재 검사

- `15.7.30 ~ : 신규 6량 편성 차량(38량) 도면 작성 중

○ 추후일정

- 2016년 9월 이전에 초도 차량 투입을 위해 공정관리 철저

- 차량 투입 계획 : ′16.8월 첫차 투입→′16년말 32량 투입→′17년말 전량 투입

2. 위 기 계약건수 이외 이후 추가 차량 구매계획(총 대수 및 구매방식 등)

○ 9호선 전구간 개통 대비 열차 추가 구매 : 80량(예정)

- 3단계 개통시기에 투입이 가능하도록 ′16년 상반기 발주

○ 구매방식 : 국제경쟁입찰로 조달구매

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시철도설비부)	담당사무관	황 영 일
	☎ 772-7288	주무관	장 재 순
	작 성 일 : 2015.9.17.