투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기전설비과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 2015년 한강공원 야외수영장 전기설비 보수공사

1. 기전설비과-986(2015.09.10.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 한강공원 야외수영장 전기설비 보수공사
	계약상대자	태영전력 (대표 : 이조영)
	계약일자	2015.04.09
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (감 129,000원), 공기변경 없음
	변경사유	현장여건 반영에 따른 물량 변경
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.04.09	변경후 착공일자	2015.04.09
	변경전 준공기한	2015.09.30	변경후 준공기한	2015.09.30
금 액 변 경	변 경 전	12,306,000 원
	변경금액	(감) 129,000 원
	변 경 후	12,177,000 원

붙     임 : 1. 변경계약체결통보서 1부

2. 설계변경내역서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	09/18 이상국
협조자
시행	총무과-15897	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개