투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1차) 시행[2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간-북부)]

1. 기전과-9373(2015.9.17)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 도로기전시설물 일상유지보수공사에 대하여 계약자로부터 설계변경(1차)보고가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가-북부)

나. 공사기간 : 2015. 3. 6 ~ 2015. 12. 31

다. 계약업체 : ㈜청호파워텍 대표 이순형

라. 공사금액 : 금244,699,350원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	244,699,350	244,699,350	-	-

❍ 설계변경 사유

- 제1차~제4차 작업완료에 따른 계약수량대비 시공물량 증․(감) 발생

- 신규 공종 추가에 따른 물량변경 발생

바. 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수,

시설비(401-01)

붙임 :  1. 설계변경(1차) 방침서 1부.

2. 설계변경(1차) 제출서류 1부.

3. 설계변경(1차) 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	백윤광		기전과장	이영목		북부도로사업소장	09/18 노영석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	기전과-9383	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개