투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 뚝섬한강공원 환경정비 개선사업 기본 및 실시설계 용역

1. 녹지관리과-3957(2015.09.16.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

계 약 현 황	용 역 명	뚝섬한강공원 환경정비 개선사업 기본 및 실시설계 용역
	계약상대자	(주)한림조경기술사사무소 (대표 : 김경윤)
	계 약 일 자	2014.06.19.
변 경 내 역	내 용	완수일자 변경, 계약금액 변경 없음
	변경사유	주민설명회 건의사항 반영에 따른 용역수행 기간 부족
기 간 변 경	변경전 착수일자	2014.06.19	변경후 착수일자	2014.06.19
	변경전 완수일자	2015.09.16	변경후 완수일자	2015.09.23
금 액 변 경	변 경 전	36,393,000 원
	변경금액	-
	변 경 후	36,393,000 원

붙    임 :  1. 변경계약체결통보서 1부

2. 합의각서 1부. 끝.

	총무부장
주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	09/18 이상국
협조자
시행	총무과-15937	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개