문서번호	총무과-15954
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
강상천		최대봉	09/18 이상국
협 조
	주무관			代강상천

현장근로자 근무환경 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				25백만원

2015. 9

한강사업본부

총 무 과

현장근로자 근무환경 개선 계획

안내센터 현장근로자 대기실이 협소(미설치)하여 근무환경 저해 등의 불편함을 해소 하고자 휴게실(대기실), 샤워실을 설치 하고자 함    - 시장요청사항 2013.11 -

■ 사업기간 : ‘15. 8.26 ~ ‘15.10.31

■ 사업내용

❍ 현장근로자 휴게실(대기실), 샤워실 설치 및 개선 : 2개 안내센터

- 휴게실(대기실), 샤워실 설치 : 청사 내부 1 개소 (반포안내센터)

- 이동식 철골조(컨테이너) 설치 : 1 개소 (강서 안내센터)

■ 개선대상(2015)

구 분	설치개소 수	설 치 위 치	설치시기	비고
여의도	2	청사 내 1, 외부 1	‘15 상반기	설치완료(2015.4)
양 화	2	청사 외부	〃	설치완료(2015.4)
반 포	1	청사 내부	‘15 하반기	구)안내센터 청사 내
강 서	1	청사 외부	〃	컨테이너

■ 소요예산 : 25,091천원 (부가가치세 포함)

❍ 예산과목 : 한강사업본부 청사시설개선 및 유지관리, 시설비

- 반  포 : 15,400천원 (온수보일러, 바닥 난방 별도 시행)

- 강  서 :  9,691천원 (전기 인입공사 별도 시행)

■ 추진방법 : 수의계약

- 반  포 : 소규모 공사 (내부 칸막이 설치 및 화장실, 샤워실 개선 등)

- 강  서 : 제작·구매 설치 (컨테이너 제작·구매 설치)

■ 추진계획

❍ 2015. 8.26 ~  8.31 : 현장조사 및 설치계획 수립

❍ 2015. 9. 1 ~  9.12 : 설계도서 작성

❍ 2015. 9.13 ~  9.23 : 방침, 공사 발주 및 계약

❍ 2015.10. 1 ~ 10.30 : 공사추진

❍ 2015.10.31 : 준공(검수) 예정

별첨

휴게실 설치 부지 현황

❍ 반포 안내센터

위치도 / 안내센터 옆	설치장소 / 구)청사 내부

❍ 강서 안내센터

위치도(안내센터 옆)	설치장소(청사 하류측)