문서번호	설비부-11613
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 09/18 박기형
협조

장안교 성능개선 전기공사 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

장안교 성능개선 전기공사 발주 계획

우리 본부에서 추진하는 장안교(구교) 성능개선 전기공사의 공사발주에 대해 보고 드림.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 장안교(구교) 성능개선 전기공사

□ 위    치 : 서울특별시 동대문구 장안동 92 ~ 중랑구 면목동 170

□ 공사규모 : B=17.6m, L=218m

□ 공사기간 : 착공일 ~ 2016. 12. 15일(토목공사 2014.12.16.~2016.12.15.)

□ 주요설비 : 가로등 13본, 교통신호등 5본 등

□ 공 사 비 : 200백만원 (도급비 180, 관급비 20)

2		추 진 경 과

□ 2014. 8. 31 : 실시설계용역 완료

□ 2014. 12. 16 : 토목공사 착공

3		예 산 현 황

□ 예산 및 발주금액                                     (단위 : 천원)

예산과목	‘15년 배정액	발주금액	비 고
시 설 비	100,000	180,202

□ 예산과목

교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 일반교량관리, 장안교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비

4		사업추진 계획

공사 발주

구 분	공 사 기 간	공 사 비	공 사 내 용	비 고
총차	착공일 ~ 2016.12.15.	180,191
1차	착공일 ~ 2016.6.30.	100,000	경관조명 철거 (구)장안교 가로등 철거 교통우회가교 임시가로등 설치 교통신호등 이설(1차)	토목공정 및 예산을 고려하여 차수계약 시행
2차	2016.7. ~ 2016.12.15.	80,191	교통우회가로등 임시가로등 철거 장안교 가로등 설치 교통신호등 이설(2차)

입찰참가 자격 및 낙찰자 결정

분 야	입찰참가 자격	공 통
전 기	○ 「전기공사업법」에 의한 전기공사업 등록업체	지역제한

□ 낙찰자 결정방법 : 시설공사 적격심사 세부기준(안전행정부 예규)에 의함

□ 현장설명 : 생략(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제15조 제3항)

관급자재 수급계획

(단위 : 천원)

분 야	품 목	단 가	수 량	금 액	발주방법	비 고
전 기	조명기구 LED150W	1,029	18	18,522	3자단가
계				18,522

5		향후 계획

□ 2015. 09월 : 공사착공

□ 2016. 12월 : 공사완료.  끝.