함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사)

1. 우리정수센터에서 시행중인 「강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사」에 대하여 설계변경하고 아래와 같이 변경계약을 의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 강북아리수정수센터 응집침전지 벽체 보수공사

나. 공사기간 : 2015. 05. 06. ～ 2015. 11. 21.

다. 도 급 자 : 거야건설(주) 대표 김성환

라. 계약금액 : 금781,587,100원

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
합 계		781,587,100원	771,199,000원	(감)10,388,100원
도급비	계	781,587,100원	771,199,000원	(감)10,388,100원
	공급가액	710,533,728원	701,090,000원	(감)9,443,728원
	부가세	71,053,372원	70,109,000원	(감)944,372원

마. 계약금액 변경 내역

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

따로붙임 1. 설계변경 시행 방침서  1부.

2. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서 1부.

3. 합의서               1부.

4. 설계변경내역         1부.

5. 제비율 검증          1부.       끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김동우		정수시설과장	09/18 안길찬
협조자
시행	정수시설과-3117	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개