문서번호	시설관리과-20571
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
안규태	09/18 송근호
협 조

급수공사 연기보고(교체장애-2,3)

명에 의거 서초1동외 10개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	당초공사기간	연기사유	비고
교체장애 -2,3	양재동327-3 양재동 70-2	교체장애 D=40mm	2015.09.11.~ 2015.09.18	가정인입선이 아연도관으로 도로굴착 승인 후 공사 진행

3. 보고내용 : 현장확인 결과 가정인입선이 아연도관으로 확인됨에 따라 도로굴착 승인 후 인입관 개량공사를 실시하고 교체장애수전 정비를 시행하고자 함

4. 보고자 처리 의견 : 상기 보고내용처럼  급수공사를 연기 처리코자 합니다.

가. 연기내용

- 당초 :  2015.09.11. ~ 2015.09.18.

- 변경 :  2015.09.11. ~ 2015.10.30.

나. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 공사 연기원 1부(별도 첨부).  끝.