함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(가락동 154-17~139외 4개소 배급수관정비공사)

우리사업소에서 시행중인 「가락동 154-17~139외 4개소 배급수관정비공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 가락동 154-17~139외 4개소 배급수관정비공사

나. 계 약 자 : (주)장위건설  대표 유용수

다. 계약기간 : 2015. 04. 27 ~ 2015. 10. 04

라. 설계변경 금액

구분	계약금액			비고
	당초	변경	증 ․ 감
도급비	271,365,170	252,180,000	감 19,185,170

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 및 계약금액 감소에 따른 변경

바. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

사. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 배급수관 정비)

붙임 : 1) 설계변경 관련 자료 각 1부.

2) 합의서 1부. 끝.

주무관	김종수		급수운영과장	전명수		강동수도사업소장	09/18 김명용
협조자	주무관	김용현		주무관	임홍희
시행	급수운영과-16097	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	3146-5189	/	kjso0704@seoul.go.kr	/	대시민공개