문서번호	정수시설과-3399
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최병일		윤종민	09/18 이성재
협 조
	주무관			김인준

설계변경 계획보고

[2015년 취.정수장 자동제어설비(PLC)유지관리용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

설계변경 계획보고

[2015년 취.정수장 자동제어설비(PLC)유지관리용역]

2.3계열 여과지 철거 및 오니처리장과 취수장 노후에 따른 유지관리필요성 증가로 자동제어설비(PLC) 유지관리용역 대상이 변경되어 이를 반영하고자 함

Ⅰ		사 업 개 요

◯ 사 업 명 : 2015년 취·정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리용역

◯ 사업기간 : 2015.04.01. ~ 2016. 03. 31

◯ 계약금액 : 금17,942,000원

◯ 계 약 자 : (주)종성테크 대표 임성규

◯ 사업내용

- 장애 및 사고 긴급복구

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등

- PLC시스템 정상동작 확인 및 성능 모니터링 등

Ⅱ		설계변경 사항

○ 설계변경 사유

- 2.3계열 여과지 철거에 따른 유지보수 대상물량 감소

- 오니처리장 및 취수장 노후에 따른 유지보수 필요 물량 증가

○ 변경내용

- 반영기간: 2015.10.1. ∼2016.3.31.

- 계약금액: 2,635천원 감소

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약금액[천원]	8,971	7,552	1,419천원 감소

- 세부변경내역(PLC): 총 3개소 감소

구분	위치	변경설비	비고
제거	2,3계열	8개소 (#3침전지 Local, #3응집지지 Local, #2여과지유입밸브Main, #3여과지유입밸브Main, #2,3응집기Main, #2,3침전지Main,#2여과지Main,#3여과지Main)	9개소 감소
	배수정	1개소(배수정Main)
추가	취수장	2개소(수질측정기, 유량측정기)	6개소 증가
	오니처리장	4개소(Main, 탈수설비[2대], 폴리머투입기)

Ⅲ		조치계획

○ 상기 변경내용의 적정성에 대하여 설계변경심의회를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 계약을 하고자 함

붙   임 : 1. 변경내역서 2부. 끝.