문서번호	인재기획과-12100
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
남성준		代남성준	09/18 박기용
협조

다솜관 구조 보수보강 공사 시행계획

2015. 9.

인  재  기  획  과

(시설재무팀)

다솜관 구조 보수보강 공사 시행계획

‘12.7. 다솜관 정밀안전진단 결과에 따른 구조 보강부재에 대하여 시공성 및 경제성 등을 고려한 최적의 보강공법을 선정하고, 선정된 보강공법을 적용하여 보강설계 용역이 완료되었기, 공사를 시행코자함

Ⅰ		공사 개요

○ 공사명 : 인재원 다솜관 구조 보수보강 공사

○ 위  치 : 서초구 남부순환로 340길 58, 인재원 다솜관

○ 기  간 : 2015. 10.05 ~ 2015. 10. 29(25일간)

○ 내  용 :

- 기둥(3개소: 강판보강법) : 지상1층, 지상2층, 지상3층

- 바닥보(2개소:탄소섬유쉬트 보강공법) : 지상1층(식당)

바닥보(지상1층:식당 밑)	기둥(지상1층)

기둥(지상2층)	기둥(지상3층)

Ⅱ		소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 46,183,200원

- 예산과목 : 인재원청사 보수․보강, 시설비(401-01)

○ 계약방법

- 건축공사 : 전자공개 수의계약(지역제한:서울시,자격제한:시설물유지관리업)

Ⅲ		공사 추진일정

○ 공사발주 및 계약 : 2015. 9.18 ~ 10.04

○ 공사착공 및 시행 : 2015. 10.5 ~ 10.29

○ 공사완료 및 준공 : 2015. 10. 30.  끝.