문서번호	정수시설과-3113
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		안길찬	09/18 代김형규
협조

강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2015.  9.

강북아리수정수센터

정수시설과

강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 함.

1. 심의대상

가. 공 사 명 : 강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사

나. 도 급 자 : 거야건설(주)  대표 김성환

다. 공사기간 : 2015. 5. 6. ~ 2015. 11. 21.

라. 도 급 비 : 781,587,100원

마. 공사개요 : 4지(연면적 6,170㎡)

2. 심의일시 : 2015. 9. 18.(금)

가. 심의장소 : 강북아리수정수센터 정수시설과 사무실

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경개요

구 분	금 액		증, 감
	당 초	변 경
도 급 비	781,587,100	771,199,000	-10,388,100

나. 주요 공종 변경사항

- 벽체 몰탈 보수면적 증가, 균열보수 길이와 콘테이너 창고 물량 감소

- 건강, 연금 및 노인장기요양보험료, 건설기계대여보증금 미지급에 따른 정산

- 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비 등 제경비 정산

▸ 주요 물량 증, 감

공 종	규격	단위	수 량		증, 감
			당 초	변 경	증	감
단면보수	연면적	㎡	6,170	6,244	74
균열보수	길이	m	357	214		143
가설창고	콘티이너	개	1	0		1

4. 심의내용 및 결과

공사명	심 의 내 용	결 정 내 용
강북아리수정수센터 응집 침전지 벽체 보수공사	◦ 설계변경 타당성 ◦ 신규공종 단가산출 타당성 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정성 ◦ 각종 제반규정 준수여부	◦ 설계변경 타당 ◦ 신규공종 없음 ◦ 제경비 적정산정 및 적용 적정 ◦ 각종 제반규정 준수타당

※ 본청 원가관리시스템에 의하여 제비율 검증 실시(2015. 9. 18)

5. 조치의견

공사 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 정산 설계변경하여 재계약을 의뢰하고자 합니다.

따로붙임 1. 설계변경 심의결과서      1부.

2. 심의 결정된 변경 설계서  1부.

3. 제비율 검증             1부.  끝.