문서번호	교통정보과-15169
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통정보팀장	교통정보과장
구지선	代최종선	09/18 이경순

교통정책지원시스템 구축을 위한 정보화전략계획 수립 관련

준공기한 연기 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.9

교통정보과

「교통정책지원시스템 구축을 위한 정보화전략계획 수립」 관련

준공기한 연기 계획

교통정책지원시스템 구축을 위한 정보화전략계획 수립 사업과 관련하여 교통관련 기반자료(노선, 정류장 등) ID체계 일원화가 ’15년 10월에 완료됨에 따라 시스템 개발 일정이 절대 부족하여 준공기한을 연기하고자 함.

□ 계약개요

○ 계약건명 : 교통정책 지원시스템 구축을 위한 정보화전략계획 수립

○ 계약기간 : 2014. 11.28 ~ 2015. 9.27(304일)

○ 계약비용 : 436,000,000원(VAT 포함)

○ 계약상대자(공동수급) : 주식회사 유비앤에스(연세대학교 산학협력단)

○ 과업내용

① 정보화 전략계획 수립(ISP)

- 교통자료, 사회경제자료 데이터 구축 및 분석· 활용방안 수립

- 교통카드 데이터를 활용한 개인통행특성 분석

- 교통정책, 계획 평가 방법론 개발

- 거시적 교통 수요변화 분석 방법론 개발

- 교통정책 수립 및 지원시스템 구축 로드맵 제시 등

② 교통정책지원시스템 구축

- 교통자료 수집 및 표출체계 구축

- 사회 경제자료 수집 및 표출체계 구축

- 교통정책 변화 및 평가결과 표출체계 구축

- 빅데이터 분석을 위한 시각화 도구 개발 등

□ 준공기한 연기계획

○ 연기사유 : 교통 기반자료 ID체계 일원화가 ’15년 10월 완료됨에 따라 시스템 개발 일정 부족

- 본 과업은 교통관련 자료(교통카드, 대중교통 운행정보 등)와 사회경제 자료(인구통계, 토지이용 등)의 입체적 융합이 가능한 교통정책지원시스템을 구축하여 시민생활 여건 및 요구사항이 반영된 과학적 교통정책 수립의 기반을 조성하고자 하는 사업으로,

- 교통정책지원시스템의 기초자료인 교통카드 정보와 대중교통 운행정보의 기반정보(노선, 정류장 등) ID체계 일원화 작업에 ’15년 10월에 완료됨에 따라 시스템 개발 일정이 절대적으로 부족하여 준공기한 연기가 필요함

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 변경사항

구분	당초	변경	비고
준공기한	2015년 9월 27일	2015년 12월 11일	75일 연기

□ 행정사항

○ ’15. 9. 18 : 계약변경 의뢰(→재무과)

<계약변경 내역>

구분	당초	변경	비고
계약기간	2014년11월28일 ~ 2015년 9월27일 (304일)	2014년11월28일 ~ 2015년12월11일 (379일)	75일 연기
계약금액	436,000,000원	436,000,000원	변동없음

붙임1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

붙임2. 과업 진행현황 1부. 끝.