문서번호	시설과-6789
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
송창선		代김윤철	09/18 이용태
협조
	조경팀장		남상국

중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사 실정사항 검토보고

2015. 9

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

현장 실정사항 검토보고

중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사의 공사감독을 맡고 있는 시설관리공단으로부터 실정사항이 접수되어 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 체험의 숲 조성공사

○ 공사기간 : 2015년 4월 20일 ~ 2015년 10월 16일

○ 도 급 액 : 749,384,000원

○ 도 급 자 : 아이서비스(주) 김세민

□ 검토내용

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
상징 안내판	▷청소년체험의 숲을 나타낼 수 있는 독특한 상징물 설치필요	▶상징물 설치(비교표 참조) ※발주처 결정안 반영
장비창고 및 운영자 대기실	▷운영자센터에서 체험의 숲까지 120m로 장비착용 후 이동이 곤란하여 체험의 숲내 장비창고 및 운영자 대기실 설치 필요	▶컨테이너하우스 설치(비교표 참조) ※발주처 결정안 반영
외곽휀스 및 출입문	▷체험의 숲 운영시간외 공원이용자들의 안전사고 방지를 위한 접근차단시설 설치 필요	▶외곽휀스 및 출입문 설치 ⁃ 외곽휀스(H1.5) :０→ 240m ⁃ 출입문(W3.0) :０→ 2개소 ※발주처 결정안 반영
참나무 시들음병방제	▷체험시설을 설치하는 생목이 대부분 참나무류로 최근 참나무류에 피해를 주는 참나무시드름병 방제 필요 ※한강나무병원 문의(2015.8.25)	▶체험의 숲내 참나무류에 대한 참나무시들음병 방제 시행 ⁃ 참나무시들음병 방제(B40~50) : 0 → 40주

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고
체험시설 위치조정	▷체험시설 설치가 생목 및 목재기둥에 설치토록 설계되었으나 시설의 하중 고려가 일부 미흡한 시설이 있어 시설물 위치 조정이 필요함.	▶하중이 많은 시설을 인공기둥에 설치 되도록 일부 체험 시설 위치를 변경하여 설치 ※시공사 및 설계사 의견 반영 ⁃ 정글지그재그 ↔ 플랭크패스 ⁃ 카고네트2 ↔ 스모부이2 ⁃ 버마스틱 ↔ 롱발란스빔 ⁃ 카고네트 → 스카이보드 ⁃ 스카이보드 → 버마빔브릿지 ⁃ 버마빔브릿지→ 카고네트

□ 공사비 변경

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		835,142,080	906,428,080	71,286,000
도급비	공급가액	681,258,182	746,063,637	64,805,455
	부가가치세	68,125,818	74,606,363	6,480,545
	소 계	749,384,000	820,670,000	71,286,000
이 전 비		15,000,000	15,000,000	0
관 급 자 재 비		70,758,080	70,758,080	0

□ 검토의견

○ 청소년 체험의 숲 관리·운영상 필요한 시설 및 조치사항으로 공사감독 기관의 실정보고 사항을 승인처리 하고자하며, 아래 사항에 대해서는 추가 검토하도록 통보하고자 함

- 등산로 주변의 외곽휀스는 접근차단을 위해 휀스높이를 1.9m로 시행

- CCTV 추가설치 필요성 여부(당초 설계에는 cctv 1대 반영)

- 설계에 반영된 돌배수로 및 미반영된 기존 목재배수로 설치여부

○ 상기 사항에 대해 소요되는 예산은 본 공사의 낙찰차액으로 시행

첨 부 : 실정사항 검토 공문 1부.  끝.