문서번호	기전과-11835
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
박태진		09/18 박재경
협 조

『2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)』

제1차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

강서도로사업소

(기전과)

『2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)』

제1차 작업지시 계획 보고

보행환경 및 가로경관 정비를 위하여 노후된 신호지주를 통합지주로 개선하고자 「2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)」 1차 작업지시 계획을 보고합니다.

Ⅰ		추 진 근 거

○ 교통운영과-6237(2015.04.01.)  신호지주 통합대상 현황 및 조가선 없는 지주

설치예정 장소 제출

○ 교통운영과-11559(2015.06.17.)  2015년 교통신호기분야 사업추진을 위한 예산

추가배정

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)

○ 계약일자 : 2015년 08월 10일

○ 계약금액 : 금175,553,000원(금일억칠천오백오십오만삼천원)

○ 공사기간 : 2015.08.13. ~ 2015.12.31.

○ 시공업체 : ㈜벽슬이앤지 대표자 오춘희

○ 감리업체 : ㈜영호이앤씨 대표자 서태교

Ⅲ		작업지시 계획

○ 작업차수 : 작업지시 1차

○ 작업기간 : 2015.09.21.(월) ~ 2015.11.06.(금)

○ 작업완료보고서 제출기한 : 2015.11.06.(금)

○ 설계, 감리 및 시공 작업지시 업체

- 설계사 : ㈜트래픽스 대표자 김희수

- 시공사 : ㈜벽슬이앤지 대표자 오춘희

- 감리사 : ㈜영호이앤씨 대표자 서태교

Ⅳ		작업지시 내용

○ 교통운영과에서 통합지주 설치가능 대상지 조사시 기 제출한 대상지

연번	대상장소(주소)	교차로명(t-gis)	작업내용	비고
1	영등포구 여의도동 2-8번지	광장아파트(경보)	노후된 경보등 지주(1본)을 통합지주(1본)으로 교체 (경보등 + 가로등 통합, 지주는 와이어 없는 지주 사용)
2	양천구 신정동 1110번지	영등포여상앞길(경보)	노후된 경보등 지주(2본)을 통합지주(1본), 일반지주(1본)으로 교체 (경보등 + 가로등 통합, 지주는 와이어 없는 지주 사용)
3	양천구 신월동 822번지	일신빌딩(경보)	노후된 경보등 지주(2본)을 통합지주(1본), 일반지주(1본)으로 교체 (경보등 + 가로등 통합, 지주는 와이어 없는 지주 사용)
4	강서구 화곡동 949-7번지	일성스카이빌(경보)	노후된 경보등 지주(3본)을 1본은 철거하고, 나머지 2본은 통합지주(2본)으로 교체 (경보등 + 가로등 통합, 지주는 와이어 없는 지주 사용)

Ⅴ		와이어 없는 지주 시범설치 추진

○ 추진 목적

무질서하던 지주형 시설물을 신호등 중심으로 통합 정비하고자 통합지주를

설치하는 사항으로, 기존 교통신호등 디자인지주를 개선한 와이어 없는 지주를

시범설치 하여 보행환경 및 가로경관을 향상시키고자 함.

○ 지주 선정 조건 【추진근거 : 교통운영과-20354(2014.10.30)】

- 와이어 없는 신호등 지주로 아래의 조건을 만족하는 제품

1) 구조안정성 검토를 완료한 제품.

2) 지주색상(기와진회색), 지주재질, 신호등 부착방법, 압버튼부착방법, 신호지주

주각(기초부분)은 “서울시 교통신호지주 표준도면”의 지주와 동동이상의

품질을 확보한 제품.

3) 향후 다른 시설물과 통합가능 하도록 제작된 제품.

○ 추진 절차

1. 감리업체 및  시공업체에 와이어 없는 지주 설치 작업지시 (강서도로사업소)

2. 상기 조건에 맞는 제품를 선정하여 기자재 공급원(와이어 없는 지주) 승인 요청

(시공사->감리사)

3. 승인요청서류 검토 후 기자재 공급원 승인 (감리사)

4. 시공자재(와이어 없는 지주) 납품 및 시공 (시공사)

Ⅵ		행 정 사 항

○ 시공업체 및 감리업체에 작업지시서 발송

붙 임 : 관련공문 1부.  끝.