문서번호	도로보수과-4087
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	09/21 국중진

작업완료(일부구간) 보고서(제5,6차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료(부분) 보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2015년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 56a, 절삭후덧씌우기 : 152a

○ 공사기간 : 2015. 3. 10 ~ 2015. 12. 31

○ 착  공  일 : 2015. 3. 10

○ 준공예정일 : 2015. 12. 31

○ 도  급  자 : 정만건설(주)  박창엽

○ 도 급 비 : 601,176,180원

□ 보고현황

【5차】

○ 5차 작업지시

- 작업지시일 : 2015. 7. 16

- 작업기간 : 2015. 7. 16 ~ 10. 31

- 작업지시내용 : 천호대로 808 ~ 광장동 89 외 8개소

(굴착복구A-1 : 63.62a, 차로단위복구 : 21.88a, 소형고압 : 0.45a)

○ 작업완료구간 내용(5차)

- 작업완료일 : 2015. 9. 21

- 작업완료내용(5개소) : 천호대로 133앞 외 4개소

(굴착복구A-1 : 18.22a, 차로단위복구 : 18.34a, 소형고압 : 0.45a)

- 진행중(3개소) : 천호대로 808 ~ 광장동 89 외 2개소

(굴착복구A-1 : 26.37a, 차로단위복구 : 59.28a)

- 미착공(1개소) : 한천로58길 74

(굴착복구A-1 : 21.6㎡)

○ 작업현황

지시 번호		위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
5-1		천호대로 808 ~광장동 89	A-1	1.5	470.0	705.0				공사중
			평삭(A-1)	4.0	235.0	940.0
			평삭(배수성)	4.0	235.0	940.0
5-2		천호대로 133 앞	A-1	1.4	9.0	12.6	2.0	4.2	8.4
			평삭(A-1)	3.0	9.0	27.0			소규모 (표층포장)
5-3		성수동1가 642-23 ~ 642-1	A-1	1.5	26.0	39.0	1.2~3.0	25.6	36.12
			평삭(A-1)	3.5	26.0	91.0	3.5	23.0	80.5
5-4	1	답십리로 276 ~ 한천로 127	A-1	1.2	456.0	547.0	1.0~3.0	475.6	665.86	공사중
			평삭(A-1)	3.0	40.0	120.0			진행중
			평삭(배수성)	3.0	416.0	1,248.0			진행중
	2	답십리로 266 앞	A-1	1.2	22.0	26.4	1.2	22.0	26.4
	3	답십리로 252 앞	A-1	1.2	9.5	11.4	1.2	9.5	11.4
	4	답십리로 244 앞	A-1	1.2	6.0	7.2	1.2	6.0	7.2
5-5		왕산로 277 ~ 247	A-1	1.2	412.0	494.4	1.4~4.1	426.8	635.81
			평삭(A-1)	3.0	412.0	1,236.0	3.2~6.2	435.0	1,753.7
5-6		동일로 450 ~ 동일로380	A-1	2.0	670.0	1,340.0				공사중
			평삭(A-1)	4.0	670.0	2,680.0
5-7		면목동 379-35 앞	A-1	1.2	7.0	8.4	0.7	7.0	4.9
5-8	1	광나루로 509 ~ 535	A-1	1.2	275.0	330.0	1.0~3.1	241.3	342.19
			평삭(A-1)	4.0	275.0	1,100.0	굴착시행도로정비에 포함
	2	광나루로 509 앞	A-1	1.2	16.0	19.2	1.2	16.0	19.2
			평삭(A-1)	4.0	16.0	64.0	굴착시행도로정비에 포함
	3	광나루로 513 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	1.2	3.8	4.56
	4	광나루로 517 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	1.5~3.5	2.4	6.0
	5	광나루로 517-5 앞	A-1	1.2	28.0	33.6	1.2	28.0	33.6
	6	광나루로 521 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	원인자복구
	7	광나루로 525 앞	소형고압	1.2	6.0	7.2	원인자복구
	8	광나루로 527 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	0.8~1.5	10.4	12.82
	9	광나루로 529 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	원인자복구
	10	광나루로 532 앞	A-1	1.2	26.0	31.2	1.2	26.0	31.2
			평삭(A-1)	4.0	26.0	104.0	굴착시행도로정비에 포함
	11	광나루로 531 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	원인자복구
	12	광나루로 533 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	원인자복구
	13	광나루로 535 앞	소형고압	1.2	4.0	4.8	1.2~1.6	3.7	5.24
5-9		한천로 58길 74	A-1	1.2	18.0	21.6				미착공
계									1,822.28 (1,834.2) 소형고압(28.62)

【6차】

○ 6차 작업지시

- 작업지시일 : 2015. 8. 5

- 작업기간 : 2015. 8. 5 ~ 10. 31

- 작업지시내용 : 자양동 206-2 ~ 203-21 외 7개소

(굴착복구A-1 : 23.43a, 차로단위복구 : 63.24a)

○ 작업완료구간 내용(6차)

- 작업완료일 : 2015. 9. 21

- 작업완료내용(4개소) : 자양동 206-2 ~ 203-21 외 3개소

(굴착복구A-1 : 11.62a, 차로단위복구 : 44.52a)

- 진행중(3개소) : 용답동 225-6 ~228-1 외 2개소

(굴착복구A-1 : 13.65a, 차로단위복구 : 24.53a)

연번		위 치	포장 종류 및 등급	지시내용			복구내용			비 고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
6-1		자양동 206-2 ~ 203-21	A-1	1.2	60.0	72.0	1.25~1.3	73.7	93.31
			평삭(A-1)	4.0	60.0	240.0	3.3~11.0	67.4	487.72
6-2		묵동 28 앞	A-1	2.0	53.0	106.0	1.6~3.0	82.3	215.75
			평삭(A-1)	3.5	53.0	185.5	3.1~10.0	74.6	500.33
6-3		성수동1가 685-30 ~ 685-678	A-1	1.2	630.0	756.0	1.25~2.2	627.3	805.82
			평삭(A-1)	3.5	630.0	2,205.0	3.2~6.0	612.0	2,111.6
6-4	1	용답동 225-6 ~ 228-1	A-1	1.2	10.0	12.0				공사중
			평삭(A-1)	3.5	10.0	35.0
	2	용답동 228-5 ~ 229-1	A-1	1.2	10.0	12.0
			평삭(A-1)	3.5	10.0	35.0
	3	용답동 229-6 ~ 232-1	A-1	1.2	15.0	18.0
			평삭(A-1)	3.5	15.0	52.5
	4	용답동 233-1 ~ 235-2	A-1	1.2	173.0	207.6
			평삭(A-1)	3.5	173.0	605.5
	5	용답동 235-5 ~ 236-1	A-1	1.2	18.0	21.6
			평삭(A-1)	3.5	18.0	63.0

○ 작업현황

6-5	1	중화동 287-10 ~ 288-27	평삭(A-1)	3.5	151.0	528.5	2.2~6.8	253.1	1,216.9
	2	중화동 450 ~ 294-10	평삭(A-1)	6.6	91.0	600.6
6-6	1	상봉동 101-12 ~ 91-4	A-1	1.3	255.0	331.5				공사중
			평삭(A-1)	3.5	255.0	892.5
	2	상봉동 79-6 ~ 79	A-1	1.3	150.0	195.0
			평삭(A-1)	3.5	150.0	525.0
	3	상봉동 564-7 ~ 564-8	A-1	1.3	40.0	52.0
			평삭(A-1)	3.5	40.0	140.0
	4	상봉동 564-7 ~ 564-8	A-1	1.3	30.0	39.0
			평삭(A-1)	3.5	30.0	105.0
6-7		전농동 620-67 앞	A-1	1.2	37.0	44.4	1.2	40.0	48.0
			평삭(A-1)	3.0	37.0	111.0	3.4	40.0	136.0
6-8	1	상봉동 81-16 ~ 399-7	A-1	1.2	34.0	40.8				공사중
	2	상봉동 101-10 ~ 81	A-1	1.2	325.0	390.0
	3	상봉동 79-9 ~ 564-7	A-1	1.2	38.0	45.6
계									1,162.88 (4,452.55)

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 진행중인 공사(6개소), 미착공(1개소)를 제외한 복구 완료된 구간에 대하여 추후 설계변경에 반영하여 준공처리 하고자 하며, 진행중인 공사(미착공)에 대하여는 복구완료후 완료보고 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료(부분)보고서 2부(별도). 끝.