함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(고덕초등학교외 6개소 학교급수시설 개선공사[전기])

1. 우리사업소에서 시행하는 『고덕초등학교외 6개소 학교급수시설 개선공사[전기]』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 고덕초등학교외 6개소 학교급수시설 개선공사[전기]

나. 공사개요 : 당초 음수대배관전기 D=2.5~6.0SQ, L=1,316m

변경 음수대배관전기 D=2.5~6.0SQ, L=1,254m (감)62m

다. 도 급 자 : ㈜태경전업 대표 정태홍

라. 계약기간 : 2015.07.02 ~ 2015.10.21

마. 변경내용

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증 감
도 급 비	43,754,348	40,918,000	감2,836,348

바. 설계변경 사유

- 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종발생

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비42201000)

붙  임 : 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 제비율 검증 1부.  끝.

주무관	윤기영		주무관	김효수		시설관리과장	남정열		강동수도사업소장	09/21 김명용
협조자	주무관	임홍희
시행	시설관리과-18013	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51	/
전화	3146-5194	/전송	3146-5239	/	life@seoul.go.kr	/	대시민공개